문서번호	건축부-10502
결재일자	2023. 7. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	문화시설과장	건축부장		시설국장
김동석	왕승찬	이형재		07/04
				안대희
협 조
	체육시설팀장		장병균

『서울 어울림체육센터 건립공사』

계약변경(공사기간 연장) 검토 보고

2023. 6. 30. (금)

도시기반시설본부

(건축부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

『서울 어울림체육센터 건립공사』

계약변경(공사기간 연장) 검토 보고

『서울 어울림체육센터 건립공사』의 건설사업관리기술인으로부터 제출된 레미콘 수급지연으로 인한 공사기간 연장 요청건을 검토하여 보고 드림

□ 공사개요

ㅇ 위    치: 서울특별시 노원구 상계동 1268

ㅇ 규    모: 지하 2층 / 지상 3층, 연면적 14,779.98㎡

(수영장 10레인, 볼링장 32레인, 다목적 체육관 등)

ㅇ 계약금액: **********************************

ㅇ 공사기간: '22. 7. 25.~'25. 6. 1. (34개월)

(1차: '22. 7. 25.~'23. 8. 13.)

ㅇ 시 공 사: ㈜코원건설 외 1개사(건축, 토목, 조경)

ㅇ 건설사업관리용역사: ㈜토문엔지니어링 건축사사무소 외 2개사

ㅇ 공 정 율: 18.1%

□ 추진경위

ㅇ '19. 12. ~ 21. 5.   : 설계용역 실시

ㅇ '22. 7. 29.   : 공사 계약

ㅇ '22. 7. 25.   : 공사 착공 (건축, 토목, 조경)

ㅇ '22. 8. 30.   : 착공식

ㅇ '23. 1.  9.   : CIP 천공 및 레미콘 타설 착수

ㅇ '23. 6. 현재  : 터파기 및 가시설설치 중

□ 공사기간 연장 내용

ㅇ 관련근거 등

- 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제13장 공사계약일반조건 제8절(계약이행의 지체와 계약의 해제 ․  해지)

-『레미콘수급지연 등에 의한 공기연장 검토 보고』어울림 제2306-050호(2023. 6. 30.)

-『준공기한연기 요청의 건』코원어울림-제2023-06-12호(2023. 6. 27.)

*******************

****************

*********************************************

************************

************************

***********************

〈*****************

**	******	************
*********	***	*****************************
*********	**	************************
**	***	*********

***************************************

******************

□ 조치 계획

**********************************************************

〈*****************

****		****	****	***	**
**	**	******************	*******************	******
	**	***************	***************	****
**	**	*******************	*******************	******
	**	**************	**************	****

붙임: 공기연장 검토보고서(건설사업관리단) 1부.  끝.