아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	설계변경 및 변경계약 의뢰(전체6회, 2차1회) - 창동 상계 동서간 연결교량 보차도교 건설공사

우리 부에서 추진중인 「창동 상계 동서간 연결교량 보차도교 건설공사」설계변경

(전체6회, 2차1회)및 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 창동 상계 동서간 연결교량 보차도교 건설공사(장기2차)

나. 시 공 사 : **************

다. 설계변경 내역

○ 전체 6회

구 분		당 초	변 경	증 · 감
전체 6회	총공사비	**************	**************	**	*************
	도 급 비	**************	**************	**	*************
	관급자재대	*************	*************	**	**********
	이 전 비	************	************		*
	공사기간	***********************	**********************	*	****

○ 2차 1회

구 분		당 초	변 경	증 · 감
2차 1회	총공사비	*************	*************	**	*************
	도 급 비	*************	*************	**	*************
	관급자재대	***********	***********	**	**********
	이 전 비	**	*		*
	공사기간	**********************	***********************		****

라. 설계변경 및 공기연장 사유

- 설계변경 : 실정보고 승인사항 반영 및 공사 물량 조정 등

- 공기연장 : 23년도 사업예산 부족에 따른 공정계획 변경

붙 임 : 1. 건설사업관리단 설계변경 검토 보고서 1부.

2. 내부 보고서 1부.

3. 설계변경 내역서 / 예정공정표 / 합의각서 각 1부. 끝.

	토 목 부 장
주무관	이회진		교량건설과장	이성주		토목부장	07/04
이임섭
협조자
시행	토목부-12135	(	2023. 7. 4.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-3708-2576	/전송	02-3708-2599	/	colaten@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)