문서번호	금융투자과-5978
결재일자	2023. 7. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	투자관리팀장	금융투자과장
김대훈	엄태현	07/07
		代정경란

디지털금융지원센터 건립부지 지반조사 용역

과업내용 추가에 따른 계약변경 검토

2023.  7.

경 제 정 책 실

(금융투자과)

디지털금융지원센터 건립부지 지반조사 용역

과업내용 추가에 따른 계약변경 검토

디지털금융지원센터 건립부지 지반조사 용역 시행 중 ************************ 과업내용이 추가되어 계약을 변경하고자 함

□ 용역개요

ㅇ 용 역 명 : 디지털금융지원센터 건립부지 지반조사 용역

ㅇ 계약업체 : 주식회사 대일이엔씨

ㅇ 계약금액 : 금33,573,030원

ㅇ 계약기간 : 2023.5.31. ~ 2023.7.15.

ㅇ 과업내용

- 시추조사(NX 3공) 및 현장시험(소규모 지하안전영향평가 필수 시험항목)

- 실내시험, 하향식 탄성파 탐사, 지표투과레이더 탐사, 현황측량 및 지장물조사 등

□ 변경사항

**************************************

*********************************************

******************************************************************************************

***************************************

******************************************************************************************************************************************************************************************************

**********************************************************************************

□ 행정사항

ㅇ 지체상금 : 미부과(귀책소재 : 서울특별시)

**************************************)

ㅇ 예산과목 : 금융·투자생태계 활성화를 통한 경제활력 제고, 금융산업 지원체계 구축, 디지털금융지원센터 건립, 시설비(401-01)

※ 행정안전부 "2023년 지방재정 상반기 신속집행 적극 활용 지침"에 따라 기존사업과 동일한 목적을 달성하기 위한 추가사업으로 시설비 낙찰차액 활용

□ 향후계획

************************************************

*******************************

**************************************************

***********************

붙임  1. 변경내역서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서(안) 1부.  끝.