아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	설계변경(2차) 시행-서소문고가 정밀안전진단 및 욱천복개2구간 외 4개소 정밀안전점검 및 실태조사용역

1. 시설보수과-6305(2023. 7. 10.) 『욱천고가차도 정밀안전점검 용역 시행계획』와 관련입니다.

2. 우리 부서에서 시행 중인 용역 관련하여 아래와 같이 설계변경(2차)을 시행하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명: 서소문고가 정밀안전진단 및 욱천복개2구간 외 4개소 정밀안전점검 및 실태조사용역

나. 용역기간: 2023. 4. 10. ~ 2024. 4. 8.

다. 도 급 자: (재)한국건설품질연구원 / 탄탄안전(주)

라. 설계변경 내역

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
용역비	계	565,175,000	599,615,000	증) 34,440,000
	공급가액	513,795,455	545,104,546	증) 31,309,091
	부가가치세	51,349,545	54,510,454	증) 3,130,909

마. 설계변경 사유

- 욱천고가차도 정밀안전점검 용역을 기 추진용역에 과업 추가하여 시행

바. 예산과목

- 서부도로사업소 시설보수과, 교량관리, 교량시설물 점검관리, 교량시설물 안전점검 및 진단, 시설비및부대비, 시설비 (예산편성부서: 재난안전관리실 교량안전과)

붙임  1. 방침서 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	시 설 보 수 과 장
주무관	김지하		주무관	정병구		시설보수과장	07/12
안준수
협조자
시행	시설보수과-6487	(	2023. 7. 12.	)	접수		(		)
우	03918	서울시 마포구 가양대로 203, 서부도로사업소 시설보수과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-300-8381	/전송	02-300-8384	/	jh8008@seoul.go.kr	/	부분공개(5)