문서번호	도시철도설비부-6799
결재일자	2023. 7. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	신호과장	도시철도설비부장
강신영	조준규	07/12
		전계목

별내선(8호선연장) 신호보안설비공사(2공구)       BN5 정거장 신호기계실 인입전선로 개선 실정보고 검토

2023.  7.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

별내선(8호선연장) 신호보안설비공사(2공구)    BN5 정거장 신호기계실 인입전선로 개선 실정보고 검토

현장 여건 변화에 따른 BN5 정거장 신호기계실 인입전선로 시공법 변경을 위해 실정보고를 검토하고 보고드림

□ 관련근거

*********************************************************************************************

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명: 별내선(8호선연장) 신호보안설비공사(2공구)

ㅇ 위    치: BN2 제어범위(서울시계)~BN6(별내역)

*****************************************************************

ㅇ 공사내용

- 신호보안설비공사(본선 10.105km), 신호기(표지) 152기, 선로전환기 10대 설치 등

ㅇ 공 사 비: 5,145,943천원 (2차 3,230,036천원)

ㅇ 시 공 사: ㈜서우건설산업 대표 이종근 외 2개사

ㅇ 감 리 단: ㈜에이알텍 대표 이상남

□ 실정보고 내용

***********

************************************************************************************************************

*************

**************************************

*************************************

***********************************************************************

*************

*************************************************************

*************

*************************************************************************

****************

*************************************************************************************************************************************************

*********************

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 시스템분야 감리단 검토 결과

ㅇ 현장 여건에 맞는 시공법을 적용하였으며, 변경된 시공법에 대한 품셈을 적용하여 금액을 산출하였음

□ 조치의견

ㅇ 위 실정보고 사항을 검토한 결과 "케이블 트레이 덕트" 공종에 적용이 불가한 할증(설치높이 4m이상 120%)을 반영하였기에 이를 감하는 조건으로 조건부 승인처리 후 시공토록하고 추후 설계변경 및 도면변경하여 준공처리코자 함

붙임  시스템분야 감리단 실정 보고서 1부.  끝.