문서번호	토목부-12896
결재일자	2023. 7. 12.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		토목설계과장	토목부장
김종혁		김상익	07/12
			이임섭
협조

설계변경 검토 보고

[월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 건설사업(설계감리)용역]

2023. 7.

도시기반시설본부

토목부

설계변경 검토 보고

「월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 건설사업(설계감리)용역」중 ***********************************에 따른 설계변경 검토 보고임

□ 관련근거

ㅇ 계약변경에 대한 변경 내역서 제출 【제일(발)-2023-2887호(2023.7.12.)】

□ 용역개요

ㅇ 위    치 : 서울특별시 영등포구 양평동 월드컵대교 남단 일대

ㅇ 규    모 : 연결로 5개소, 지하차도, 보행육갑문

ㅇ 용역기간 : 2017.8.11. ~ 2023.7.31.

ㅇ 용역금액 : 389,526,000원

ㅇ 용 역 사 : ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소

□ 추진경위

ㅇ '17.02.16. : 월드컵대교 남단 보완설계 추진계획 보고 (부시장 보고)

ㅇ '17.08.07. : 보완설계용역 계약 및 착수

ㅇ '20.06.12. : 안양천 접근 보행연결로 추가 반영 설계변경 방침

ㅇ '20.11.27. : 안양천 접근 보행연결로 추가 반영 설계 추진 (시설국장)

ㅇ '21.4.~'22.6. : 하천점용 사전협의 완료 (한강유역환경청)

ㅇ '22.08.18. : 안양천 접근 보행연결로 사업 추진방안 결정 (도로계획과→토목부)

ㅇ '22.12.31. : 안양천 접근 보행연결로 설계 완료

□ 설계변경 사유 : 건설사업관리(설계감리)용역 추가 시행

ㅇ 「월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계용역」용역 시행중

************************************************************************

************************************************************

**********************************

**********************************************

***************************************

ㅇ 설계용역은 기 설계변경하여 설계비를 지급하였으나, 설계감리비는 준공 정산시 설계변경 요청하여 금번 변경 시행

□ 설계감리비 증·감 내역 변경 검토

구 분	당초	변경	증·감
총액	************	************	************
계약금액	************	************	************

□ 검토의견 및 조치계획

ㅇ 추가 설계에 의한 건설사업관리(설계감리)비 반영은 적절하므로 건설사업관리자 요청대로 변경계약 추진

□ 향후계획

ㅇ 2023. 7.  : 변경 계약 요청 (토목부→총무부)

붙임 : 건설사업관리자 설계변경 요청 공문 1부. 끝.