문서번호	정수시설과-2137
결재일자	2023. 7. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
손영일		최병희	07/13
			윤준성
협 조

[2024년 투자사업]

고도처리시설 폐쇄형배전반 교체 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.  07.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

[2024년 투자사업]

고도처리시설 폐쇄형배전반 교체계획

현재 진행중인 정수센터 수전전압 변경사업과 연계로 전기설비 보호 방식 변경으로 인한 설비 호환을 위해 정수센터 고도처리시설에 있는 폐쇄형 배전반 교체에 대하여 보고드림

1		현황 및 문제점

□ 시설 현황

□ 고도처리시설 폐쇄형 배전반

시설명	수량	규격	설치년도	교체계획	비 고
*****	**	*****	****	****	*******
****	**	*******	****	****	*******
*****	***	*****	****	****	*******
*****	**	********	****	****	*******
*****	****	********	****	****	*******

□ 현장사진

고압수전반 및 변압기반	저압반	저압반

□ 교체 필요성

□ 내년초 준공예정인 정수센터 수전전압 변경사업과 관련, 사고방지용        보호방식 계통연계를 위하여 설비 전체를 일체로 교체하여야 함.

(지구 전기실 6개소중 5개소는 '22년~'23년 교체)

□ 오랜사용으로 염소 등 가스에 의해 배전반 내부부품(부스바 등)이 부식        된 상태로 사고방지를 위하여 전면 교체가 필요함.

2		개선계획

□ 사고방지 보호계통 연계를 위한 폐쇄형 배전반 교체

□ 건    명 : 고도처리시설 폐쇄형 배전반 교체

□ 대    상 : 폐쇄형배전반(고압수전반,변압기반,저압배전반,전동기기동반)

□ 추진방법 : 2024년 예산반영 추진

□ 사업기간 : 2024.01월 ~ 10월.

□ ******************

***********************************************

*********************************************

***************************************

****************************************

***********************************************

********************************************

□ 예산과목

- 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비및부대비, 시설비

3		추진일정

□ ‘24. 01월 ~ 4월         : 설계도서 작성

□ ‘24. 05월                : 설계심사 등 실시

□ ‘24. 06월 ~ 10월        : 사업시행(조달구매)

4		기대효과

□ 전력설비 보호계통 연계구축으로 전기 사고방지 예방 및 안정적인       아리수 공급

□ 사고없는 정수센터로 직원의 안전한 근무환경 마련. 끝