문서번호	원수관리과-1269
결재일자	2023. 7. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
김윤구		노지문	07/13
			윤준성
협조
	주무관		마동훈

「2024년 투자사업」 강북통합취수장 노후 수위계측설비 교체 계획

「2024년 투자사업」

강북통합취수장 노후 수위계측설비 교체 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.  07.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

「2024년 투자사업」

강북통합취수장 노후 수위계측설비 교체 계획

내용연수(10년) 경과 및 장기사용으로 인해 정확도가 떨어지는 취수장 수위계측설비를 교체하여 안정적인 정수제어 운영에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		현황 및 문제점

□ 취수장 수위계 현황 : 붙임참조

ㅇ ************************************

ㅇ **********************************

□ 2024년도 교체 대상 수위계 : 5대

구분	시설물 용도	형식	모델	제조사	설치년도	내용연수
*	******	********	*************	******	****	***
*	**********	********	******	******	****	***
*	**********	********	******	******	****	***
*	**********	********	*************	******	****	***
*	**********	********	*************	******	****	***

□ 현장 사진

*	*	*	*	*
*******	**********	**********	**********	***********

□ 문제점

ㅇ 2010년 ~ 2011년 설치되어 내용연수(10년)가 지나 노후화되어

헌팅 현상이 발생하는 등 정상 기능을 발하지 못하는 수위계를

교체함으로써 정확한 수위 자료 수집을 통해 깨끗한 아리수 생산에 기여

ㅇ 수위감시계 데이터 헌팅현상

****

Ⅱ		개선계획

□ 취수장 노후 수위계측설비(수위계) 교체

ㅇ 건    명 : 강북통합취수장 노후 수위계측설비 교체

ㅇ 교체대상 : 한강 수위계 등 5개소

ㅇ 사업기간 : `24.3. ~ `24.7.

ㅇ 소요예산 : ********

**********************************

**********************************

ㅇ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비 및 부대비,

시설비

Ⅲ		추진일정

□ `24.01.           : 설계

□ `24.03.           : 발주

□ `24.04. ~ 07.     : 공사 실시

□ `24.08.           : 준공

Ⅳ		기대효과

□ 수위 자료를 통해 침수에 대비하여 취수장 시설물 사전 보호

□ 정확한 수위 자료 수집을 통해 깨끗한 아리수 생산에 기여

붙임  1. 사업별설명서(강북통합취수장 노후 수위계측설비 교체) 1부. 끝.