문서번호	서울숲관리사무소-5100
결재일자	2023. 7. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	서울숲관리사무소장
임혜경		박계현	전결 07/14
			하종식
협조

「2023년 서울숲 산책로 및 노후시설물 정비공사」

실정사항 검토보고

2023. 7.

동부공원여가센터

(서울숲관리사무소)

「2023년 서울숲 산책로 및 노후시설물 정비공사」

실정사항 검토보고

우리 센터에서 시행중인『2023년 서울숲 산책로 및 노후시설물 정비공사』와 관련, 현장여건에 따른 실정사항이 발생하여 아래와 같이 검토 보고 드림

Ⅰ		공사개요

❍ 공 사 명 : 2023년 서울숲 산책로 및 노후시설물 정비공사

❍ 공사위치 : 서울숲내 숲속놀이터 휴게쉼터 등 8개소

❍ 공사내용 : 파고라등 노후 휴게시설물 교체, 육묘장 생태숲조성,

산책로 재정비, 커뮤니티센터앞 노후 데크 교체 등

❍ 공사기간 : 2023. 5. 10. ~ 8. 7.(90일)

❍ 총공사비 : 금 426,172,160원

- 도급비 : 금 288,458,000원 – 관급자재 : 금 137,714,160원

❍ 도 급 사 : 남우산업개발(주) 대표 김활현

❍ 발 주 처 : 동부공원여가센터

Ⅱ		추진사항

❍ 2023.1.7. ~ 3.20. : 설계용역 시행

❍ 2023. 4.7.          : 공사 발주

❍ 2023. 5.6.          : 공사계약

❍ 2023. 5.10.         : 공사착공

※ 서울시설공단 감독대행사업임

Ⅲ		실정사항 검토내용

❍ 추진근거

- 주간 공정회의 및 회의록(매주 월요일)

- 상기 공사 추진 관련 실정사항 검토 요청 공문(‘23.6.15 및 ‘23.7.10)

❍ 검토내용

- 발주처 요청사항

구 분	현황 및 문제점	검토 사항	비 고
산책로 (6구간)	▶ 상기 위치는 급경사지로 장마철 및 태풍 등으로 국지성 집중 호우 및 폭우가 내릴 때 배수가 원활하지 못한 지역으로 자연재재 예방 등을 위해 측면에 배수시설 설치 및 토사 유하 방지용 실재 필요	▪ 산책로 측면에 U형측구(배수시설) 설치 ▪ 산책로 사면은 토사 흘러내림 방지를 위해 지피류(수호초) 식재
오소정원 (8구간)	▶ 오소정원 내 물품보관함 관리부서(공원여가과) 요구사항 반영에 따른 제작 설치 필요	▪ 관급자재 물품 설치에서 맞춤 제작 설치로 변경에 따라 물품보관함 관금자재 물량 전량 삭감
육묘장 (7구간)	▶ 육묘장내 메쉬휀스 설치 장소는 도구보관 용도로 이용되고 있고 휀스 상태 양호하여 이설 재검토 필요 ▶ 수목 식재 물량 및 위치 조정 필요 - 설계내역 수목중 수급불가 수종(말발도리등 3종) 발생 - 안전사고 예방 및 진입차단을 위한 수목 식재 추가 필요	▪ 메쉬휀스 이설 제외 ▪ 수급 불가 수종에 대하여 설계내역서 상 대체 수종으로 변경 및 수목 식재지 밀식되지 않도록 현장 여건에 맞추어 물량 조정 ▪ 무지개터널 사면 및 개울 인접지 안전사고 예방 및 육묘장 인접 생태숲, 커뮤니티센터앞 녹지대 진입차단을 위한 수목 식재 추가
커뮤티니센터 (1구간)	▶ 커뮤니티센터 데크 앞 기존 포장구간 노후화 되어 교체 필요	▪ 기존 노후 포장 철거하고 인조화강석블럭 포장 시공

- 주간 공정회의 회의사항

구 분	현황 및 문제점	검토 사항	비 고
테니스장 (3구간)	▶ 테니스장내 기존 물품보관소 철거 공종이 타공사(서울숲 노후 체육시설물 정비공사)와 중복으로 설계되어 있음	▪ 기존 물품보관소 철거 공종 제외
커뮤니티센터 (4구간)	▶ 커뮤니티센터 앞 기존 석재볼라드는 현재 폐용된 상태이며, 법적규격(보행안전법) 미충족 시설물임	▪ 이설 계획된 볼라드 철거로 변경
오소정원 (8구간)	▶ 오소정원 화장실 뒤편 기존 정화조가 바닥면보다 높은 상태로 미관저해 및 배수불량 발생	▪ 블록포장 시공시 배수 구배를 위해 정화조 높이를 바닥면과 같게 낮추고 그에 따라 늘어나는 정화조 뚜껑 교체
재포장	▶ 숲속놀이터 파고라 교체시 바닥포장 필요 ▶ 물놀이터 및 농구장옆 파고라 교체시 바닥 포장 필요 ▶ 석재볼라드 철거 후 포장 필요	▪ 고무칩 포장 공정 추가 ▪ 물놀이터, 농구장옆 파고라 교체 및 석재볼라드 철거시기존 블록 재활용하여 포장 공정 추가

❍ 개량공사비 증감내역

구 분		공 사 비(원)		증 감 (당초대비)	비 고
		당 초	변 경
도급액	공급가액	262,234,547	289,416,365	27,181,818
	부가세	26,223,453	28,941,635	2,718,182
	도급비계	288,458,000	318,358,000	29,900,000
관급자재	도급자관급	35,489,110	36,173,110	684,000
	관급자관급	102,225,050	97,901,830	-4,323,220
	관급자재계	137,714,160	134,074,940	-3,639,220
총사업비		426,172,160	452,432,940	26,260,780

Ⅳ		보고자 의견

❍ 현장여건을 검토한바, 상기와 같이 공사 시행함이 타당할 것으로 판단되므로, 설계변경하여 사업추진에 만전을 기하고자 함. 끝.