문서번호	정수시설과-2166
결재일자	2023. 7. 14.
공개여부	부분공개(2,5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
이석배		최병희	07/14
			윤준성
협 조
	주무관			정준석

［2024년 단위사업］

여과지동(3,4계열) 옥상방수공사 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.  7.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

[2024년 단위사업]

여과지동(3,4계열) 옥상방수공사 추진계획

여과지동 3,4계열 옥상 방수층 이음부 노후로 마감테이프 열화 및

박리·박락으로 방수기능이 저하되어 보수하고자 함

Ⅰ		보수 실적 및 계획

□ 정수시설물(건축물) 옥상 방수공사 추진실적

○ 건축년도 : 1999년 12월

시 설 물	구 분	연면적 (㎡)	방수시공		최근 보수실적
			시공공법	시공연도
송수펌프동	-	3,926.6	스카이패널	2008년	2016년
약품투입동	1·2계열	420			2018년
	3·4계열	420			2018년
여과지동	3계열	3,863		2009년	2018년
	4계열	3,863			2019년
여과지동	1,2계열	7,726	폴리우레아	2023년	2023년
관리본관	-	1141.9

□ 년차별 보수계획

시설물	구분	연면적 (㎡)	방수시공		보수계획
			공법	시공연도
여과지동	3,4계열	7,726	스카이패널	2010년	2024년
활성탄투입동	-	186		2011년	2025년 이후
탈수기동	-	1,078
GIS동	-	500

※ 옥상 방수층 노후상태에 따라 년차적 보수시행

Ⅱ		문제점 및 정비계획

□ 현황 및 문제점

◯ 현재 여과지동 옥상방수공법은 방수 금속판넬 및 접합부 테이핑 마감방법의 스카이패널 공법으로 시공되어 있으며,

◯ 내구연한(5년) 경과 및 노후로 접합부 마감테이프 열화, 박리·박락 발생으로 방수기능 저하되어 보수가 필요한 실정임

여과지동(3계열) 옥상방수 현장	여과지동(4계열) 옥상방수 현장

□ 정비계획

○ 현재 시공되어 있는 방수층 보수재(스카이패널)로 부분(접합부) 보수시 타 공법과 방수층 생애주기를 비교할 때 소요예산 과다

(내용연수 10년기준)                                            (단위:천원)

구 분	스카이패널	도막공법	시트공법
최초시공	320,000	350,000~450,000	370,000~430,000
보수(회/5년)	230,000	-	-
계	550,000	350,000~450,000	370,000~430,000

○ 패널공법외 기타 방수공법(시트 및 도막) 등의 검토 필요

- 특정공법 선정 심사위원회 의결후 공법선정

- 시공 공법의 생애주기 등을 비교,검토하여 최적안 선택

Ⅲ		추 진 계 획

□ 2024년 예산반영

◯ 사 업 명: 여과지동 3,4계열 옥상방수 보수공사

◯ 소요예산: 600,000천원

◯ 사업내용: 여과지동(3,4계열) 옥상방수 보수 7,726㎡

◯ 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지비

◯ 추진일정

- 설   계  --------------------- 2024. 2.

- 계약심사 --------------------- 2024. 2.

- 공사발주 및 계약 ---------------- 2024. 3.

- 공사착공 및 사업시행 ----------- 2024. 4. ~ 9.

Ⅳ		사 업 효 과

□ 구조물의 내구력 및 효용 증진으로 구조물 최적 상태 유지

□ 옥상 방수층의 지속적인 방수력 유지로 시설물 안전 확보

끝.