문서번호	정수시설과-2200
결재일자	2023. 7. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	정수시설과장		강북아리수정수센터소장
김동석	손영일	최병희		07/17
				윤준성
협 조

[2024년 투자사업]

정수공정 노후 계측설비(수위계) 교체계획

2023. 07.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

[2024년 투자사업]

정수공정 노후 계측설비(수위계) 교체계획

정수센터 내 장기간 사용으로 인한 노후 계측설비(수위계)를 교체, 성능 개선하여 안정적인 정수제어 운영으로 아리수생산에 기여하고자 함.

Ⅰ		현황 및 개선사항

□ 설치년도별 수위계 현황 : 총 160 대

구분	설치년도	수량	단위	내구연한	비고
1	2014	41	대	9년	교체대상
2	2015	8	대	″
3	2018	8	대	″
4	2019	4	대	″
5	2020	70	대	″
6	2021	1	대	″
7	2022	24	대	″
8	2023	4	대	″

□ 사업대상

구분	시설물용도	형식	수량	단위	측정범위	설치년도
1	고도 흡수정 수위 계측	초음파식	4	대	9m	2014
2	고도 활성탄 흡착지 수위 계측	초음파식	36	대	5m	2014
3	고도 회수조 수위계측	초음파식	2	대	8m	2014

□ 현장사진

고도 흡수정 수위계	고도 활성탄 흡착지 수위계	고도 회수조 수위계

□ 교체 필요성

○ 현재 운영중인 계측설비(수위계) 내구연한 경과(2014년설치)로 부품단종 등으로 유지관리가 어려움.

○ 장기간 사용에 따라 부품 단종 및 노후화로 인해 정상기능 확보에 어려움이 있음.

Ⅱ		추진계획

□ 노후 계측설비(수위계) 교체계획

○ 사 업 명 : 정수공정 노후 계측설비(수위계) 성능개선

○ 사업대상 : **********************

○ 추진방법 : *************

○ 사업기간 : 2024.01월. ~ 08월.

○ 소요예산 : *********

- **********************************************

- ********************************************

- *********************************************

- ****************************************

○ 예산과목

-********************************

Ⅲ		추진일정

□ '24.01월               : 물품제조·구매 설계

□ '24.02월               : 물품제조 계약심사 및 조합 우수업체 추천의뢰

□ '24.03월               : 계약의뢰

□ '24.04월 ~ '24.08월    : 물품계약 및 납품

Ⅳ		기대효과

□ 노후 계측설비(수위계) 교체를 통한 성능개선으로 안정적인 정수제어시스템 운영으로 맑고 깨끗한 정수생산에 기여.

□ 고도처리시설 수위 인지방법 개선으로 선제적 사고예방.  끝.