문서번호	건축부-11556
결재일자	2023. 7. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	건축설계과장	건축부장
오종근	홍순명	07/18
		이형재

『동북권 아동·청소년 예술교육센터 및 강북구 종합체육센터 건립공사』

철근 정산 및 철근가공 추가공사 실정보고서 검토보고

2023.  7.

도시기반시설본부

(시설국 건축부)

동북권 아동.청소년 예술교육센터 및 강북구 종합체육센터 건립공사』

철근 정산 및 철근가공 추가공사 실정보고서 검토보고

『동북권 아동·청소년 예술교육센터 및 강북구 종합체육센터 건립공사』와 관련 철근 정산 및 철근가공 추가공사 실정보고서가 접수되어 검토결과를 보고드림

- 도급비 :********************************************

□ 사업개요

ㅇ 공 사 명 : 동북권 아동청소년 예술교육센터 및 강북구 종합체육센터 건립공사

ㅇ 대지위치 : 강북구 미아동 811-2

ㅇ 건립규모 : 지하2층, 지상4층, 연면적 7,371.25㎡, 신축

- ***************************************

*********************************************

ㅇ 총공사비(건축,토목,조경) : ******************

- 서울시,강북구 구분

(단위: 원)

구 분	합 계	서울시	강북구
총공사비	**************	**************	*************
도 급 비	**************	**************	*************
관 급 비	*************	*************	*************

- 차수별 도급비 현황

(단위: 원)

구분	합계	서울시	강북구	계약기간
총차	**************	**************	*************	********************
1차	*************	*************	*************	********************
2차	*************	*************	*************	********************
3차	**************	*************	*************	********************

ㅇ 공사기간 :*************************

ㅇ 시 공 사 : 대상건설(주)외 1개사

ㅇ 건설사업관리자 : ㈜종합건축사사무소근정외 1개사

□ 추 진 경 위

ㅇ ’19.  9. 16. : 착공

ㅇ ’20. 11. 14. : 1차수 준공

ㅇ ’20. 11. 15. : 2차수 착공

ㅇ ’21. 11.  6. : 2차수 준공

ㅇ ’21. 11.  7. : 3차수 착공

ㅇ ’23. 7월현재 : ******************

□ 실정보고사항

ㅇ 관련근거

-「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제74조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

- 도급자 관급자재비(철근)정산 및 철근가공 추가공사 실정보고에 대한 적정성 검토 보고의 건【동북권CM 제23-247호('23.07.11.)】

- 실정보고 검토 알림【강북구 건축과-24496('23.07.14.)】

ㅇ 실정보고 내용

- 관급자재(철근) 정산결과 **************************************

반입량	사용량	증감	증가금액	비고
**********	**********	*********	***********	*************** ***************

- 철근가공 조립비 정산결과 *********************************

※직접비 기준임

도급계약수량	정산수량	증감	증가금액	비고
**********	**********	*********	***********	*************** ***************

- 공사비 증가(************

구분	당초	변경	증·감	비고
직접공사비	***********	***********	**********
간접공사비	***********	***********	**********
공급가액	***********	***********	**********
부가가치세	**********	**********	*********
철근감액정산	*	***********	***********
도급액	***********	***********	*********	*************** *********************

□ 강북구 검토의견

ㅇ 철근 정산 및 철근가공 추가공사 실정보고가 ****************************로 시공지시코자 하며,

ㅇ 본 실정보고 사항으로****************

□ 건설사업관리단 검토의견

ㅇ 관급자재 현장 반입 철근량이 ***************************************************************************

ㅇ 철근가종조리비******************************************************************************************* 정산함.

ㅇ 관급자재비(철근) 정산 및 철근 가공조립비에 대한 ********************************** 판단됨.

□ 처 리 의 견

ㅇ 강북구, 건설사업관리단 검토의견이 *******************************하고, 추후 설계변경 자문위원회 등 계약변경 절차를 거쳐 계약변경코자 함.

붙임 : 1. 강북구 실정보고 검토 공문 및 보고서 1부.

2. 건설사업관리단 실정보고 검토보고서 1부.  끝.