문서번호	시설관리과-12923
결재일자	2023. 7. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장		남부수도사업소장
정지덕	오영진	조임남		07/19
				김분숙
협 조
	행정지원과장		홍기관

노량진배수지(3지) 내부 방식공사 추진계획

2023. 7.

남부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

노량진배수지(3지) 내부 방식공사 추진계획

배수지 내부 콘크리트의 부식방지 및 구조물의 내구연한 증대와 깨끗한 수돗물 공급을 위한 노량진배수지(3지) 내부 방식공사를 보고드림

Ⅰ		추진배경

□ 관련근거

ㅇ 시설관리과-3413(2022.2.23.) 배수지구조물 내부방식 및 보수·보강 중장기계획

ㅇ 본부 시설과-9550(2021.10.15.) 배수지 내부 방식 계열선정심의위원회 개최 결과

ㅇ 본부 시설관리과-22137(2022.06.09.) 배수지 내부방식 일반공법 시범 시공계획

ㅇ 본부 시설관리과-28371(2022.12.29.) 2023년 배수지 내부방식공사 추진계획

Ⅱ		추진현황

□ 노량진배수지 내부 방식공사 추진현황

ㅇ 사업기간 : 2021년 ~ 2027년

ㅇ 시설위치 : 동작구 본동 258-1

ㅇ 시설용량 : 110,000㎥, 총 7개지

ㅇ 지(池)별 현황 및 추진실적

구분	계	1지	2지	3지	4지	5지	6지	7지	비고
시설용량(㎥)	110,000	15,615	15,615	15,615	15,615	15,133	15,615	16,792
내부면적(㎡)	71,067	10,088	10,088	10,088	10,088	9,778	10,088	10,849
******	***** ****	***** ****	***** *****	*****	*****	*****	*****	*****

□ 내부방식 계열선정 결과

ㅇ 본부 계열선정심의위원회(`21. 10.) 결과 준용

ㅇ 노량진배수지 부위별 계열선정 결과

**********************

******************

Ⅲ		추진계획

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 노량진배수지(3지) 내부 방식공사

ㅇ 공사규모 : 내부방식 10,088㎡ ※ 도막식 6,223㎡, 패널식 3,865㎡

ㅇ 공사기간 : **************************

**********************************************************

******************************************************

ㅇ 소요예산 : ********

ㅇ 예산과목

- 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비,수선유지비(배수지내부방식)

ㅇ 예정공정표

구분	2023년				2024년
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
그라인딩
단면보수
도막방수
패널방수
부대공

****************************

*******************************************

*******************************************************************

*****************************************

**************************************

********************************************

*******************************************************************************

****************************************

*****************************************

*******************************

******************************************

Ⅳ		품질관리 계획

******************

*********************************************************************************************************

*****************************************************************

**********

***************************

************************

********************************

**********************************************

**********************************

*****************************

*****************************

*****************

******************

*********************************************************************************************

***************************************************

******************************

******************************************

***********************************************

***********************************************************************************

***************

***************************************************************************************

************************************************

***********************

************************************************************************************************************************

****************

*************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Ⅴ		향후계획

□ 추진일정

ㅇ 2023. 7. : 계약심사/일상감사 및 계약 의뢰

ㅇ 2023. 9. : 계약체결 및 착공

ㅇ 2023. 12. : 도막제거 및 단면보수

ㅇ 2023. 8. : 도막/패널 공사 및 준공

붙임  1. 2023년 배수지 내부방식공사 추진계획(본부) 1부.

2. 배수지 내부방식 계열선정심의위원회 개최결과 1부.

3. 배수지 내부방식 일반공법 시범 시공계획 1부.

4. 공사설계내역서 1부.

5. 일반공법 시범설치 보고서(양식) 1부.

6. 단계별 시공기준 및 안전관리 가이드라인 1부.  끝.