문서번호	정수시설과-2349
결재일자	2023. 7. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
노성제		함태광	07/19
			성호준
협 조
	행정관리과장			이혜진

제1정수장 감시제어설비(RCS) 개량 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 7.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

제1정수장 감시제어설비(RCS) 개량 계획

장기간 사용으로 노후되어 성능이 저하된 제1정수장 감시제어설비(RCS)를 개량하여 안정적인 아리수 생산·공급에 만전을 기하고자 함.

□ 추진배경

○ 당초 '아리수 정수센터 재건설 등 정비 방안('20.10.28. 행정2부시장 방침 제284호)'에 따라 '25년부터 제1정수장 재건설 착수 예정이었으나,

○ '서울시 상수도 종합계획 2040('23.7.5. 시장방침 제77호)'에 따라 '32년 이후로 연기되어,

○ 그동안 보류해 왔던 제1정수장 설비에 대한 전면적 개량 필요.

□ 사업목적

○ 정수센터의 수돗물 생산과정은 거의 모든 공정이 자동화되어 있어서 감시제어설비에 대한 의존도가 절대적인 바,

○ 장기간 사용하여 노후되고 고장 발생 우려가 높은 본 설비를 최신품으로 개량하여 안정적인 아리수 생산·공급에 만전을 기하고자 함.

□ 설비현황

○ 설비개요

설비명	설치위치	규격	수량	설치년도	내용연수
감시제어설비(RCS#5)	제1정수장 약품투입동	PDP, PLC XGT 및 현장제어반	4면	2012년(현장제어반은 2009년)	11년
감시제어설비(RCS#6)	제1정수장 여과지동	PDP 및 PLC XGT	4면	2012년	11년
감시제어설비(RCS#7)	제1정수장 탈수기동	PDP 및 PLC XGT	4면	2012년	11년

※ RCS: Remote Control Station, PDP: Power Distribution Panel,

PLC: Programmable Logic Controller, XGT: 제품명

○ 현황사진

RCS#5	RCS#6	RCS#7

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 제1정수장 감시제어설비 개량

○ 사업규모

- PDP, PLC반 및 현장제어반 등 총 12면 제작·설치

- 터치 터미널, PLC 및 HMI의 소프트웨어 설계 및 구현

○ 사업기간 : 2024. 3. ~ 2024. 8.

○ 소요예산 : ********

□ 추진계획

○ 2023. 7. : 2024년 사업비 예산편성 요구.

○ 2024. 3. : 사업 시행.

붙임  예산산출자료 1부.  끝.