문서번호	토목과-9717
결재일자	2023. 7. 19.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

지방시설주사		굴착복구팀장		토목과장 직무대리		안전건설교통국장
강선덕		조영두		代허율		전결 07/19
						신용철
협조

2023년 도로굴착복구공사(단가계약)  기성검사(1회) 결과 보고

『2023년 도로굴착복구공사(단가계약)』 기성검사(1회) 결과 보고

2023. 7.

[토목과]

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 [√] 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 [ ] 공약(약속)사업 [ ] 계속사업 [√] 인센티브/공모사업 [ ]
소통·갈등분야 고려사항		●	구민			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	전문가			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	이해당사자			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등발생요인			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
여성친화 도시		성평등 [ ] 안전·편의 [ ] 가족·공동체회복 [ ] 여성참여 [ ]
데이터기반행정고려사항		데이터활용 [ ] 지표관리대상 [ ] 기타 [ ]( 분석협조 등 기타 ) 미해당 [ ] ( ) ※ 데이터기반행정 미해당시 간결하게 사유를 기재하시기 바랍니다.
아동친화 도시		아동권리 보장(생존권·보호권·발달권·참여권) [ ] 아동 의견수렴 및 반영 [ ]
기타 고려사항		일자리 [ ] 환경영향 [ ] 안전 [√] 유지비용 [ ] 바른 공공언어 [ ]
		성인지 [ ] 취약계층 [ ] 장애인 [ ] 디자인 [ ] 공직선거법 [ ]
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	서울시	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	기업	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	민간단체	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
구민의견 수렴		●	방법	:	설문조사 [ ] 만족도 조사 [ ] 찬반투표 [ ] 기타 [ ]
		●	시기	:	시행 전 [ ] 시행 중 [ ] 시행 후 [ ]
언론홍보 계획		기획보도 [ ] 보도자료 [ ] SDTV [ ] 뉴스레터 [ ] 성동구소식지 [ ]
		기고문 [ ] 전자행정서비스 [ ] SNS [ ] 기타(리플릿 등) [ ] 없음 [√]
	● 홍 보 제 목
	● 중점 홍보사항
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

『2023년 도로굴착복구공사(단가계약)』

기성검사(1회) 결과 보고

「2023년 도로굴착복구공사(단가계약)」와 관련하여 도급자의 기성준공 검사원(1회) 제출에 따른 검사 결과 보고임

1		추진근거

□ 기성계(1회) 제출의 건(선호 제2307-10호, '23. 7. 14.)

□ 기성 검사원 지정요구 및 검사의뢰서(재무과-26162호, '23. 7. 17.)

2		공사개요

□ 공 사 명: 2023년 도로굴착복구공사(단가계약)

□ 공사기간: 2023. 3. 6. ~ 2023. 12. 31.

□ 도 급 자: 선호건설주식회사 대표 ***

□ 공사규모: 아스팔트포장 A=115a, 보도포장 A=21.3a 등

□ 총공사비: ***************

- **********************************************

3		추진경과

□ 2023. 2. 8.: 공사발주

□ 2023. 3. 6.: 공사계약 및 착공

□ 2023. 6.28.: 설계변경(1회) (※현장 여건에 따른 시공물량 증·감)

□ 2023.12.31.: 공사준공(예정)

4		기성부분 검사 개요

□ 기성기간: 2023. 3. 6. ~ 6. 30.

□ 작업규모: 붙임 기성내역서(수량산출서) 참조

□ 검사내용: 기성도서 및 제경비 적정성 / 시공물량 및 시공상태 확인

□ 검 사 일: 2023. 7. 18.(화)

□ 검 사 자: 시설8급 *** / 입회자: 굴착복구팀장

□ 검사금액

(단위 : 원)

계약금액	전회까지 기성금액	금 회 기성금액	누 계 기성금액	누계 기성율	잔여금액
743,705,400	-	309,650,000	309,650,000	41.6%	434,055,400

□ 검사결과: 적합

- 도급자로부터 접수된 기성부분 검사원(1회)의 작업물량 및 내역, 현장 시공상태 등을 검토한 결과 공종별 작업이 적합하게 처리되어 기성부분 준공처리코자 함

5		조치계획

□ 기성부분 검사조서(1회) 재무과 제출 및 기성금 지급

붙임  1. 기성내역서(1회) 1부.

2. 기성준공확인요청 관련 서류 1부.

2. 기성검사 현장점검 결과 보고서 1부.  끝.