젊은경제·바른행정·신속성장, 바로 서대문!
		서 대 문 구
수신자		내부결재
(경유)
제목	「2023년 하천유지관리 및 시설물정비공사(연간단가)」설계변경(제2회) 시행

우리 구에서 시행중인 『2023년 하천유지관리 및 시설물 정비공사(연간단가)」에 대하여 대하여 다음과 같이 설계변경(제2회)을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 2023년 하천유지관리 및 시설물정비공사(연간단가)

2. 공사기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.

3. 공사개요 : 하천시설물 유지관리 1식, 하천유지관리용역 12개월 운영, 하천시설물 정비 1식

4. 계약상대자 : (주)한두건설엔지니어링 대표 정민호

5. 설계변경사유

- 홍제천 "카페 폭포" 인테리어 공사 시행으로 인한 신규 공종 등 발생

- 『홍연교 주변 보행데크 정비』 예산을 추가로 확보하고 이에 따른 공사비 증액 및 단순 물량 증감

※ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부예규) 제 9장 제6절

▷ 발주기관의 필요에 따른 공사 설계변경 통보(해당공사의 일부변경이 수반되는 추가공사의 발생)

※ 서울특별시 서대문구 계약심사 규칙 체 4조(계약심사 제외사업) 3항 마목(계약금액 5천만원 이상인 공사 중 설계변경에 따른 중액분이 계약금액의 10% 미만인 공사)

· 주요 변경사항

(단위:백만원)

분 류	단위	당 초	변 경	증・감	비 고
하상여과시설 자동세척밸브 작동	개소	12	16	증) 4
하상준설 중간집하장운반	m3	1,580	2,510	증) 930
산책로 등 데크길 하부철물 제작설치	TON	3	9.48	증) 6.48
홍제천 및 불광천 하상정리	m2	5,292	7,125	증) 1,833
홍제천 하상이끼 및 부유물제거	m2	12,000	17,470	증) 5,470
수변카페 조적공사 및 부대공사	식	0	1	증) 1
하천유지관리용역	hr	1,261	1,350	증) 89

6. 공사비

❍ 공사금액 변경현황

공 종	단위	당 초	변 경	증 ․ 감		비고
				변동	금 액
총공사비	원	1,915,321,000	2,412,321,000	증	497,000,000
도 급 비	원	1,709,861,000	1,877,771,000	증	167,910,000
관 급 비	원	124,990,000	427,080,000	증	302,090,000
이설비 등	원	80,470,000	107,470,000	증	27,000,000

7. 예산과목

(단위: 천원)

구 분		세 부 사 업	예 산 액	비 고
구 비		지방하천유지관리(하천유지관리 및 시설물 정비공사)	1,019,800	1,519,800
		홍연교 주변 보행 데크 정비(신규)	500,000
시비	재배정	하천준설 및 시설물유지관리	485,000	985,000
		재난예방[재난관리기금 재난계정]	500,000
계			2,504,800

8. 예산과목별 도급비 구분

(단위: 원)

구 분		원인행위액(당초)	변경원인액(변경)	비 고
계		1,709,861,000	1,877,771,000	증 167,910,000
구비	지방하천유지관리	724,861,000	724,861,000	-
	홍연교 주변 보행 데크 정비	0	167,910,000	증 167,910,000
시비	하천준설 및 시설물유지관리	485,000,000	485,000,000	-
	재난예방(재난관리기금 재난계정)	500,000,000	500,000,000	-

붙  임  1. 설계변경(제2회) 사유서 1부.

2. 관련문서 각 1부.

3. 변경설계서(용량초과로 PDF파일 첨부) 1부.

4. 제비율 검증확인서 1부.

5. 합의각서 1부.(원본별송)

6. 설계변경 검토보고서 1부.  끝.

주무관	김영식		수변감성하천팀장	정기찬		치수과장	시희식		안전건설국장	김태중
부구청장	07/19
진경식
협조자	주무관	양지숙		계약팀장	문혜선		재무과장	하인철
기획재정국장	강환복
시행	치수과-15237	(	2023. 7. 19.	)	접수		(		)
우	03718	서울특별시 서대문구 연희로 248	/	https://www.sdm.go.kr
전화	02-330-1425	/전송	02-330-8945	/이메일	20160125244@sdm.go.kr	/	부분공개(5)