문서번호	보행자전거과-10579
결재일자	2023. 7. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	보행자전거정책팀장	보행자전거과장
이영민	최미숙	07/19
		이선희

대학로 차없는거리

2차 시범운영 변경계약 추진계획

2023. 7.

도 시 교 통 실

(보행자전거과)

대학로 차없는거리

2차 시범운영 변경계약 추진계획

전국적 우천으로 대국민 피해가 발생해 종로구의 대학로 차 없는 거리 연계 문화행사 취소 결정에 따라 변경계약을 추진하고자 함

□ 기존 계약내용

ㅇ 용 역 명 : ’23 대학로 차 없는 거리 시범운영(2차) 교통통제(안전)시설 설치 및 관리용역

ㅇ 계 약 자 : ****(대표 : ***)

ㅇ 계약기간 : ’23.7.14. ~ ’23.8.16.

ㅇ 계약금액 : 금**********원(금*****원)

□ 계약 변경사유

ㅇ 교통통제일 변경 : ’23.7.16(일) → ’23.8.19(토)

ㅇ 변경사유 : 폭우피해로 ’23.7.16. 운영이 취소되어 ’23.8.19. 2차 시범운영

□ 용역계약 변경사항

ㅇ 계약기간 : ’23.8.16. 준공 → ’23.8.23. 준공(1주일 연장)

ㅇ 계약금액 : ******천원 → ******천원(*****천원 증)

- 증액사유 : 교통통제 사전홍보물 고정시설(입간판 등) 임차비용 1개월 추가

- 산출내역

※ 산출금액 중 *****원은 천원단위 절사함

구 분	내 용	수 량	단 가	금 액(원)
계				*********
사전홍보물 추가 대여비용 (1개월)	**	***		*********
	******	**	******	*********
	********** ********	**	******	*********
	**********	**	******	*********
기타 부대비용 증액분	*************			*********

□ 향후일정

ㅇ 계약변경 의뢰(→재무과)	: '23.7.19.

ㅇ 계약 체결(재무과)	: '23.7.28.

ㅇ 대학로 차 없는 거리 2차 시범운영	: '23.8.19.

ㅇ 용역 준공 및 잔금 지급	: '23.8.23.

붙임  1. 합의각서 1부.

2. 산출내역서 1부.  끝.