“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(1회) 시행(2023년 남부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사)

우리사업소에서 시행 중인『2023년 남부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사』에 대해 설계변경 심의를 마치고 아래와 같이 설계변경(1회)을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2023년 남부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)

나. 계 약 자 : (주) 고덕종합건설 대표 김진영

다. 공사기간 : 2023.06.27 ~ 2024.06.30.

라. 공사개요 : 아스팔트포장 247a, 콘크리트포장 10a, 보도블록포장 7a

마. 설계변경 내역                                                      (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
공 급 가 액	*************	*************	없음
부가가치세	***********	***********	없음
도 급 비	*************	*************	없음	물량만 증,감

바. 설계변경 사유 : 공종별 물량 증․감 및 신규공종 발생

사. 예산과목

- 상수도사업비용,영업비용,급수공사비,신설공사비

- 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비,시설비(장기사용배급수관정비)

- 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비,수선유지비(상수도관누수복구)

- 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비,시설비(노후밸브정비)

- 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비

- 소방 재난 능력의 향상으로 안정적인 재난시스템구축,소방용수시설 등의 설치 및         관리,소방안전특별회계,소방용수시설의 설치,시설비(소화전보수)

붙임  1. 설계변경 보고서 1부.

2. 설계변경 심의의결서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 변경계약 합의서 1부.  끝.

주무관	이용호		급수관리팀장	류태현		급수운영과장	代류태현		남부수도사업소장	07/20
김분숙
협조자	주무관	정선이
시행	급수운영과-11863	(	2023. 7. 20.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4556	/전송	02-3146-4589	/	l*********3@seoul.go.kr	/	부분공개(7)