문서번호	녹색에너지과-16464
결재일자	2023. 7. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		스마트에너지팀장	녹색에너지과장
윤희정		신수양	07/21
			김재웅
협조

공동주택 고효율 변압기 교체 지원계획

l

2023. 7.

기후환경본부

(녹색에너지과)

공동주택 고효율 변압기 교체 지원계획

노후 공동주택의 고효율 변압기 교체 지원을 통해 정전 등 안전사고를 예방하고 에너지 효율 개선에 기여하고자 함

Ⅰ		추진근거

ㅇ 서울특별시 에너지 조례 제4조 (시의책무) ․ 제28조 (행정 및 재정상의 조치 등)

ㅇ 서울특별시 기후대응기금의 설치 및 운용에 관한 조례 제5조(기금의 용도)

ㅇ 공동주택 전기설비 안전진단 및 변압기 교체 지원사업(녹색에너지과-5929(’23.3.14))

Ⅱ		사업개요

ㅇ 사 업 명 : 공동주택 고효율 변압기 교체 지원 사업

ㅇ 기    간 : 2023. 7. ~ 12.

ㅇ 지원예산 : 90백만원(한국전력공사 90백만원 별도 지원)

ㅇ 수행기관 : 서울시, 한국전력공사(서울본부, 남서울본부)

- (서울시) 계획 수립 및 홍보, 보조금심의위원회 운영, 지원금 지급 등

- (한국전력공사) 서류 및 현장점검, 지원금 지급 등

ㅇ 사업절차

	접수			▶	검토‧현장점검(1차)			▶	지원대상 선정			▶	변압기 설치
	한전				한전(지사)				보조금심의위원회				공동주택
	8월~9월				8월~10월				9월~10월				9월~12월
	▶		지원금 신청			▶	현장확인(2차)			▶	지원금 지급
			공동주택→시·한전				한전(지사)				시·한전→공동주택
			9월 ~ 12월				9월 ~ 12월				9월 ~ 12월

**************************************

Ⅲ		지원내용

ㅇ 지원대상 : 고효율 변압기 교체를 희망하는 서울시 소재 공동주택

(1순위) 서울시 전기설비 안전진단 지원사업에 참여한 공동주택(20년이상 공동주택)

(2순위) 한국전력공사 고효율변압기 교체 사업에 지원한 공동주택(연식 무관)

※ 1순위 공동주택 우선 지원 후 잔여 예산 2순위 공동주택에 지원

ㅇ 지원금 : 고효율 변압기 용량 구간별 정액 지원

구분 (단위:만원)	500㎸A 미만	1,000㎸A 미만	1,500㎸A 미만	3,000㎸A 이하
서울시	160	240	390	590
한전	160	240	390	590
합계	320	480	780	1,180

※ 예) 500kVA미만 1대, 1,000kVA미만 1대 교체시 800만원 지원(서울시,한전 각 400만원)

ㅇ 지원기기

- 고압 고객용 일반 변압기를 1차 정격전압 22.9kV이하 3상 고효율 변압기로 교체하는 고객(용량 100 ∼ 3,000kVA)

※ 한국에너지공단 효율관리제도(https://eep.energy.or.kr/) 홈페이지

▣ 지원사업 제외대상

① 한국에너지공단 에너지효율시장조성사업(EE사업) 참여고객

② 한전으로부터 전기를 공급받지 않는 고객

③ 지원사업 접수 및 선정 이전 교체 고객

- 단, 서울시가 지원한 전기설비 안전진단 결과 안전상 변압기 교체가 필요한 공동주택의 경우 지원 가능

④ 건설현장 등에서 한시적으로 사용하는 경우

⑤ 다른 장소에서 이전하여 재사용 또는 중고품 설치시

⑥ EE사업 외 타 기관 지원 사업 참여고객

- 단, 타 기관 지원사업 지원금과 한전 지원금 합계가 고효율 변압기 가격의 100%를 초과하지 않는 경우 지원 가능(관련 증빙첨부 필수)

- 단, ‘노후변압기 교체 지원사업’ 지원받은 공동주택은 서울시 지원금 제외

Ⅳ		공고 및 접수개요

□ 공고개요

ㅇ 공고기간 : ***************************

ㅇ 주요내용 : 지원내용, 지원자격, 신청방법 등

ㅇ 공고방법 : 서울시 누리집, 서울시에너지정보 누리집 등

□ 접수개요

ㅇ 신청기간 :************************

구분	신청기간	신청대상	비고
1차 접수	******************	1순위 공동주택	예산소진시 종료
2차 접수	*******************	1순위+2순위 공동주택

ㅇ 접수방법 : 한전 에너지마켓플레이스 누리집 접수

- 접수관리 : 한국전력공사(서울본부 : 한강 이북 관할, 남서울본부 : 한강 이남 관할)

- 접 수 처 : en-ter.co.kr(한전 에너지마켓플레이스)   ※ 신청서류 스캔본 첨부

ㅇ 신청서류

**********************************************************

*****************

*********************************************************************************************

**************************************

□ 선정방법

ㅇ 보조금심의위원회 구성 : ***************************

****************************************

*************************

ㅇ 심의방법 : **********************

************************************************************************

**************************************

*************************************************************************************

ㅇ 심의일정(예정)

구분	일정	심사대상
1차	************	1차 신청 공동주택
2차	**************	2차 신청 공동주택

****************************

ㅇ 심의결과 공고 : 서울시 에너지정보 누리집

Ⅴ		소요예산

□ 예    산 : ***************

ㅇ 변압기교체보조금 : *******

※ 변압기 용량별 차등 지원

ㅇ 보조금심의위원회 수당 : *****************************

************************************

*******************************************

ㅇ **********************************************************************************************************

Ⅵ		향후일정

ㅇ 사업 공고 및 신청접수(서울시, 한전)	: ’23.7.~9.

ㅇ 신청 서류 검토 및 1차 현장점검(한전)	: ’23.8.~10.

ㅇ 보조금심의위원회 개최 및 지원대상 선정 공고(서울시)	: ’23.9.~10.

ㅇ 고효율변압기 교체 설치(공동주택)	: ’23.9.~12.

ㅇ 지원금 신청(공동주택→서울시, 한전)	: ’23.9.~12.

ㅇ 2차 현장확인(한전(지사))	: ’23.9.~12.

ㅇ 지원금 지급(서울시, 한전→공동주택)	: ’23.9.~12.

ㅇ 사업 평가	: ’23.12.