문서번호	어르신여성과-28946
결재일자	2023. 07. 21
공개여부	대시민공개
방침번호	부구청장 제532호

주무관		어르신복지시설팀장		어르신여성과장		복지경제국장		부구청장
박용국		박이례		김유철		정미선		전결 07/21
								마채숙
협조

- 행촌제2경로당 그린리모델링공사 -

공사(용역) 준공기한 연기 검토보고

복지경제국

어르신여성과

- 행촌제2경로당 그린리모델링공사 -

공사(용역) 준공기한 연기 검토보고

시설공사 시행 중 해체계획서 수립, 기초보강공사 추가 등으로 절대 공사기간이 부족하여 준공기한을 연기하고자 함

Ⅰ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 행촌제2경로당 그린리모델링 공사

□ 건축규모 : 지하1층/지상3층, 연면적 267.61㎡

□ 공사기간 : 2022.12.16. ~ 2023.7.23.

□ 도 급 액(건축,기계) : 733,830,000원

□ 도 급 자(건축,기계) : 대은건설(주)(대표:배성헌)

□ 감 리 자

○ 건축감리 : 에스엔건축사사무소(대표 : 김상언, 김은진)

○ 철거감리 : 토미건축사사무소(대표 : 조명철)

Ⅱ		검 토 사 항

□ 준공기한 연기

○ 시공사 준공기한 연기

구 분	공 사 기 간		비 고
	변 경 전	변 경 후
건축·기계	'22.12.16.~'23.07.23.	'22.12.16.~'23.11.07.
전 기	'22.12.15.~'23.07.23.	'22.12.15.~'23.11.07.
소 방	'22.12.15.~'23.07.23.	'22.12.15.~'23.11.07.
폐 기 물	'22.12.16.~'23.08.13.	'22.12.16.~'23.11.07.

○ 감리자 준공기한 연기

구 분	감 리 기 간		비 고
	변 경 전	변 경 후
건축·기계	'22.12.20.~'23.07.23.	'22.12.20.~'23.11.21.
철 거	'22.12.16.~'23.07.21.	'22.12.16.~'23.08.31.
전 기	'23.03.16.~'23.09.19.	'23.03.16.~'23.11.21.

□ 연기사유

○ 건축,기계 절대 공기 부족

- 해체계획서 수립기간 소요

․ 건축물관리법에 따라 해체신고 수리를 위해 해체계획서 수립 및 구조안전확인 절차 수행으로 착공일 2023.1.25. ~ 해체신고일 2023.4.11.까지 지연

- 기초보강공사 기간 추가

․ 지하1층, 지상1층 기초판 설계 강도 미흡으로 인해 철근콘크리트 매트기초 신설로 공정이 추가

Ⅲ		검 토 의 견

□ 공사기간 절대 공기 부족에 따라 준공기한을 연기하고 계약업체의 귀책사유는 없어 지체상금은 미부과

붙임  실정보고서 1부.  끝.