문서번호	행정지원과-13077
결재일자	2023. 7. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장		북부수도사업소장
김재훈	박은화	이재남		07/24
				권태규
협 조

청사 승강기 설치 계획(수정)

2023. 7. 24.(월)

북부수도사업소

[행정지원과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

청사 승강기 설치 계획(수정)

공공청사에 대한 시민 접근성 향상, 장애인·노약자 편의성 제고와 중량물 운반 중 안전사고 방지를 위해 승강기를 설치하고자 함

Ⅰ 추진배경

□ 청사 내 장애인용 이동수단 미설치(리프트 등)로 인해 휠체어 이용 민원인 방문 시 층간 이동 불가능

□ 강동수도사업소 승강기 설치공사비 참고하여 소요예산 수정

Ⅱ 현    황

□ 청사 현황

구 조	준공연도	연 면 적	층 수
철근콘크리트	1989.07.	2,644.13㎡	지하1층, 지상4층

□ 청사 이용인원

○ 근무인원: 170명(일반직, 공무직, 기간제근로자 등)

○ 일 평균 방문인원: 55명(민원인, 관련업체 등)

※ 부서별 일 평균 방문인원

부 서	행정지원과 (1층)	요금과 (2층)	현장민원과 (2층)	시설관리과 (3층)	급수운영과 (4층)
인 원	20명	20명	2명	5명	8명

Ⅲ 문제점 및 필요성

□ 장애인·노약자 방문 시 계단이용에 의한 불편 호소 및 2차민원 유발

○ 60대~80대 방문 민원인이 많아 계단 이용 시 미끄럼 등 안전사고 우려

○ 휠체어 이용 민원인 방문 시 층간 이동 불가능

□ 공공청사에 대한 시민 이용 편의성·접근성 저해

□ 비품, 사무용품 등 구매 시 계단 이용으로 인한 안전사고 우려

□ 중량물 운반 시 제반비용 증가

○ 청사 관련 공사 시 사다리차 이용으로 인한 작업비용 증가

○ 시설공단(검침반) 요금고지서 수령 시 사다리차 이용으로 인한 주차장 이용 불편 발생

Ⅳ 설치개요

□ 건    명: 북부수도사업소 청사 승강기 설치

□ 설치위치: 청사 외곽(후문 인접로)

주차장 출입구

본관정문

청사 본관

청사 별관

승강기

설치장소

본관후문

연결통로

□ 설치규격: 장애인 겸용 13인승, 1000kg

○ 내부(1,650*1,555), 외부(2,150*1,730), 출입문 2m 이상 확보

□ 소요예산: *********

**************************************************

Ⅴ 향후계획

□ 기술용역 타당성심사: 2023.07.

□ 설계용역 시행 및 설치공사비 24년 예산 편성 : 2023.07.~2023.09.

□ 공사 계약심사 및 설치공사비 시행: 2024.03.