문서번호	도로보수과-7727
결재일자	2023. 7. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	도로보수과장	강서도로사업소장
정광욱	안동국	07/26
		이경우

『2023년 노후포장도로정비 강서1구역 노면표시공사』

설계변경(1차) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.  07.

강서도로사업소

(도로보수과)

『2023년 노후포장도로정비 강서1구역 노면표시공사』

설계변경(1차) 검토 보고

우리 사업소에서 시행 중인『2023년 노후포장도로정비 강서1구역 노면표시공사』에 대한 설계변경 검토서가 감리단으로부터 접수되어 검토결과를 아래와 같이 보고드림.

▢ 관련근거

○ 강서1구역 설계변경(1회) 제출의 건 (문창 2023-강서-020호, 2023. 7. 24.)

▢ 공사개요

○ 공 사 명 : 2023년 노후포장도로정비 강서1구역 노면표시공사

○ 공사규모 : 융착식 37,663m, 상온경화형 23,971m, 밑그림 56,477m

○ 공사기간 : '23.04.06. ~ '23.12.15.

○ 공 사 비 : 447,398,000원

○ 도 급 자 : ㈜교림 대표 정덕원

▢ 설계변경사항

○ 설계변경 사유 : 착공 후 실물량 조사 반영     ※ 발주 당시 가물량 설계

○ 공사기간 변경 : 없음

○ 물량 및 공사비 변경내역

- 공사물량 변경내역

구 분		단 위	작 업 량				비고
			당 초	변 경	증·감
노면표시	5종	m	37,663	34,882	감)	2,781
	4종	m	23,971	46,647	증)	22,676
차선제거		m	2	2		-
차로밑그림		m	56,477	81,505	증)	25,028
도로표지병	설치	개	20	20		-
	철거	개	5	5		-
교통신호수		인	180	120	감)	60
싸인보드카		일	90	20	감)	70

- 공사비 변경                                                     (단위 : 원)

구 분		당초금액	변경금액	증·감		비고
총 공 사 비		507,998,000	507,998,000		-
도급비	공급가액	406,725,455	411,244,546	증)	4,519,091
	부가가치세	40,672,545	41,124,454	증)	451,909
	계	447,398,000	452,369,000	증)	4,971,000
관 급 자 재		23,701,440	52,926,840	증)	29,225,400
이 전 비		36,898,560	2,702,160	감)	34,196,400

▢ 조치계획

○ 상기 내용과 같이 검토 보고한 설계변경 사항을 반영하여 변경계약 후 공사시행에 만전을 기하고자 함.

붙   임 : 설계변경 검토보고서(감리단) 1부.  끝.