아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	동부도로사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	원인자부담공사 변경승인 알림 「헌릉로 중앙버스전용차로 설치 전기공사(신호)」

1. ********************************와 관련됩니다.

2. 우리 사업소 관내에서 시행중인「헌릉로 중앙버스전용차로 설치 전기공사(신호)」관련 원인자부담공사 변경승인 요청에 대하여 붙임과 같이 원인자 준수사항을 이행하는 조건 으로 승인하오니 교통안전시설물 설치에 최선을 다하여 주시기 바라며, 관련 유관기관 에서는 업무에 참고하시기 바랍니다.

□ 원인자 변경승인 내용

가. 공 사 명 : 헌릉로 중앙버스전용차로 설치 전기공사(신호)

나. 공사위치 : 서초구 청계산입구삼거리 ~ 내곡IC

다. 공사기간 : 승인일 ~ 2023.07.31.

라. 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계 사	감 리 사	시 공 사
신 호	******** ***	********	***********	*******

마. 변경사항

※ 변경사유 : 현장 여건에 따른 물량 변경 및 규제심의 변경으로 인한 물량 추가

구 분	당 초	변 경	비 고
총공사비	************	**************	**************
규제심의	교통관리과-13956호 (2022.06.15.)	교통관리과-12726호 (2023.05.26.)	교차로 신설 추가

붙임  교통안전시설 설치공사 준수 및 조건사항 1부.  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(설비부장), 서 울 특 별 시 장(교통운영과장), 서울서초경찰서장(교통과장), (주)동해종합기술공사, (주)유니넷텍
주무관	이석희		기전과장	07/26
차경호
협조자
시행	기전과-9578	(	2023. 7. 26.	)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33 (대치동)	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0331	/전송	02-2040-0365	/	helios@seoul.go.kr	/	부분공개(5)