아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서울특별시미래한강본부
수신	총무과장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 연기 요청(수상레포츠 통합센터 조성 통신공사)

우리과에서 시행중인『수상레포츠 통합센터 조성 통신공사』에 소요되는 관급자재에 대하여 아래와 같이 납품기한 연기 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 건    명: 관급자재 구매(수상레포츠 통합센터 통신공사-전관방송설비)

2. 관급자재 연기 요청 내역

납 품 요구번호	물품식별 번 호	품 명	규 격	수 량	납품기한		비고
					당 초	변 경
****************	붙	임	제	출	2023/08/08	2023/10/08	납품기한연기

3. 연기사유: 선행공정 지연으로 납품시기 미도래

붙임  분할납품요구서 1부.  끝.

	기 전 설 비 과 장
주무관	허준혁		기전설비과장	07/27
代이재돈
협조자
시행	기전설비과-767	(	2023. 7. 27.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257(성수동 1가 642-25)	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3780-0744	/		/	부분공개(7)