아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역계약 변경(준공기한 연장 등) 의뢰

1. 도로시설과-1109호(2023.07.24.)호와 관련입니다.

2.「도로터널 피난·대피환경 개선용역」에 대하여 아래와 같이 변경 계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계 약 명 : 도로터널 피난·대피환경 개선용역(*********************)

나. 계 약 자 :****************

연번	상 호	주 소	대표자
1	*******	*****************************	***
2	***********	*************	***

다. 계약금액 : *****************************

라. 변경내용

○ 준공기한 연장

계약금액	당 초	******************************
	변경 후	****************************
	증․감액	****************************
계약기간	당 초	2022.08.16.~2023.08.15.
	변경 후	2022.08.16.~2023.12.15.

마. 지체상금 부과여부 : 미부과

바. 변경사유 : 붙임 1 준공기한 연장 검토 보고 참조

붙 임 1. 도로터널 방재지침 적용계획(변경 과업내역서, 설계변경내역서 등) 1식.

2. 준공기한 연장의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	도 로 시 설 과 장
주무관	김경일		도로기전팀장	허웅		도로시설과장	07/27
고영준
협조자
시행	도로시설과-1377	(	2023. 7. 27.	)	접수		(		)
우	04515	서울 중구 세종대로 110 서울특별시청 신청사 2층, 안전총괄실 도로시설과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-1677	/전송	02-2133-1078	/	kki73@seoul.go.kr	/	부분공개(5)