문서번호	급수운영과-13383
결재일자	2023. 7. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
김동하		박상열	07/27
			채재일
협조

「2022년-2차 서대문구, 마포구 관내 급수공사 및 시설물공사 건설폐기물 처리 용역」

설계변경(1차-최종) 심의위원회 개최 결과 보고

2023. 7.

서부수도사업소

(급수운영과)

설계변경(1차-최종) 심의위원회 개최결과 보고

「2022년-2차 서대문구, 마포구 관내 급수공사 및 시설물공사 건설폐기물 처리 용역」의 설계변경 검토 및 심의 계획을 아래와 같이 보고드림.

Ⅰ		용역현황

❍ 용 역 명: 2022년-2차 서대문구, 마포구 관내 급수공사 및 시설물공사 건설폐기물 처리 용역

❍ 용역기간: 2023. 2. 8.~2023. 7. 31.

❍ 용역개요: ******************************

❍ 용역금액: ************

❍ 용 역 사: ***************

Ⅱ		설계변경

❍ 설계변경 사유

- 시공에 따른 물량 증·감: 건설폐기물 운반(폐아스콘, 주간) 외 3개 공종

❍ 용역개요

- 당    초: ******************************

- 변    경: ************************************

- 증 · 감: ************************************

❍ 설계변경 금액

(단위: 원)

구 분		당 초	변 경	증·감
총 용역비		**********	**********	************
용역비	공급가액	**********	**********	************
	부가가치세	*********	*********	***********

❍ 심의위원회 결과

- 심의일시: 2023. 7. 26.(수) 16:00

- 심의내역: 시공물량 증·감으로 인한 설계변경 적정성 여부 등

- 심의결과: **

Ⅲ		향후계획

❍ 상기와 같이 시공물량 증·감으로 인한 설계변경된 사항을 자체 심의한 결과에 따라 계약상대자와 합의한 후 설계변경을 시행하고 행정지원과에 변경 계약을 의뢰코자 합니다.

붙임  1. 심의 소위원회 개최 1부.

2. 설계변경 내역서 및 심의설명서 각 1부.

3. 설계변경 심의의결서 1부.  끝.