아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	동부공원여가센터
수신	공원운영과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(2023년 서울숲 산책로 및 노후시설물 정비공사)

우리 센터에서 추진 중인 「2023년 서울숲 산책로 및 노후시설물 정비공사」와 관련, 아래와 같은 사유로 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2023년 서울숲 산책로 및 노후시설물 정비공사

나. 공사기간 : 2023. 5. 10. ~ 8. 7.

다. ************************************************************

라. ***************************************

마. 준공기한 연기

- 당  초 : 2023. 5. 10. ~ 8. 7.

- 변  경 : 2023. 5. 10. ~ 9. 6.(30일 연장)

바. 연기사유 : 장마, 폭염 등 기상상태 및 현장여건 등으로 절대공기 부족

사. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 1. 준공기한 연장 검토보고 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

	서울숲관리사무소장
주무관	임혜경		시설팀장	박계현		서울숲관리사무소장	전결 08/01
하종식
협조자
시행	서울숲관리사무소-5635	(	2023. 8. 1.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 뚝섬로 273, 동부공원여가센터 2층 시설과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-460-2960	/전송	02-460-2971	/	apricot77@seoul.go.kr	/	부분공개(5)