문서번호	기전과-7435
결재일자	2023. 7. 31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	강서도로사업소장
최대성		김병용	07/31
			이경우
협조
	주무관		김흥식

공항 지하차도 외 3개소 수중펌프 설치 공사 설계변경(정산) 계약 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 07.

강서도로사업소

(기전과)

공항 지하차도 외 3개소 수중펌프 설치 공사 설계변경(정산) 계약 보고

공항 지하차도 외 3개소 수중펌프 설치 공사에 대하여 기존 계약물량 변경 및 4대 보험료 정산을 위한 설계변경(정산) 계약을 하고자 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		공사현황

ㅇ 공 사 명 : 공항 지하차도 외 3개소 수중펌프 설치 공사

ㅇ 공사개요 : 수중펌프 설치 공사

- 재료비 및 인건비 1식

- 고재처리 1식

ㅇ 도 급 자 : ********************

ㅇ 계약금액 : **********************************

ㅇ 공사기간 : 2023. 06. 12. ~ 2023. 08. 10일

Ⅱ		설계변경(정산) 금액

(단위 : 원)

구 분		공 사 비			비 고
		당 초	변 경	증 / 감
총 공 사 비		***********	***********	*********
도급액	공급가액	***********	**********	*********
	부가가치세	**********	*********	*******
	계	***********	***********	*********

Ⅲ		설계변경 사유

ㅇ 보험료(건강보험료, 연금보험료, 노인장기요약보험, 퇴직공제부금비), 정산 및 내역 변경에 따른 감액

Ⅳ		정산내용

(단위 : 원)

***		****	****	*******	***
*****		**********	**********	*	***** ***** *******
*****		**********	**********	*
***	****	*	*	*
	*****	*********	*********	*
	*****	*******	*******	*
	*****	*********	*******	***********
	****	*********	*********	*
	*****	*********	*	***********
	*****	*********	*	***********
	********	*******	*	*********
	*******	*********	*	***********
	*****	*********	*********	*********
	**	**********	**********	***********
	****	**********	**********	*
	****	***********	**********	***********
	*****	**********	*********	*********
	*****	***********	***********	***********
*******		***********	***********	***********

Ⅴ		조치의견

ㅇ 상시 변경사유와 같이 건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료, 퇴직공제부금비 등 감소로 인한 부대경비************** 감액부분을 반영한 사항으로 물량 증 / 감 사항이 적정하게 반영되었다고 사료되어 설계변경(정산) 시행하고 준공처리 하고자 합니다.

Ⅵ		행정사항

ㅇ 관리단속과에 설계변경(정산) 계약 요청 처리

붙임  1. 갑지 및 설계변경 내역서 각1부

2. 합의각서 1부

3. 검증확인서 1부.  끝.