문서번호	기전과-4945
결재일자	2023. 8. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
박건우		문동하	08/01
			심형보
협조

『동호대교 등 3개소 노후 가로등주 교체공사』

설계변경 검토 보고

2023. 8.

성동도로사업소

(기전과)

『동호대교 등 3개소 노후 가로등주 교체공사』

설계변경 검토 보고

『동호대교 등 3개소 노후 가로등주 교체공사』시행 중 물량변동이 있어 아래와 같이 설계변경을 실시하고 준공 처리하고자 함.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 동호대교 등 3개소 노후 가로등주 교체공사

○ 계약금액 : *************

○ 계약기간 : 2023. 5. 15. ~ 8. 7.

○ 공사내용 : 가로등주 151본 교체

○ 계약업체 : *******************

□ 설계변경 개요

○ 설계변경 사유

- 공사 추진과정 중 변경된 물량 적용

- 공사원가계산서상의 각종 보험료 감액 정산

○ 설계변경 금액

(단위 : 원)

구분(총차)		계약액	변경액	증, 감	비고
도급비	공급가액	***********	***********	************
	부가가치세	**********	**********	***********
	합계	***********	***********	************

○ 주요 변경 내역

연번	내용	변경전	변경후	증, 감	비고
1	교통표지판 이설	0개	53개	***********
2	도로통제	0일	10일	***********
3	전선관 배관(플렉시블 16C)	151m	0m	***********
4	전선관 철거(플렉시블 16C)	0m	151m	***********
5	전선관 배관(플렉시블 22C)	0m	151m	***********
6	와셔, 너트 교체	0개	604개	***********
7	고재처리(고철)	0kg	8,033kg	***********
8	고재처리(알루미늄)	604kg	0kg	***********
9	고재처리(SUS)	18,909kg	10,265kg	************
11	보험료 및 간접비 정산	7,887,990원	0원	***********
합 계				************

□ 예산 집행계획

○ 증액된 금액은 공사 낙찰차액으로 설계변경 시행

□ 보고자 의견

○ 변동내역에 의거 설계변경을 시행하여 준공 처리하고자 함.

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 제비율검증 확인서 1부.

3. 산업안전보건관리비 검토결과서 및 증빙자료 각 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.