아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	동부공원여가센터
수신	공원운영과장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 연기의뢰(2023년 서울숲 산책로 및 노후시설물 정비공사)

1. 서울숲관리사무소-5632(2023.08.01)호와 관련입니다.

2. 우리 센터에서 시행중인「2023년 서울숲 산책로 및 노후시설물 정비공사」에 소요되는 관급자재의 납품기한을 아래와 같이 연기하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 관급자재 납품기한 연기

〇 공 사 명 : 2023년 서울숲 산책로 및 노후시설물 정비공사

〇 품    명 : 물품보관소

〇 연기사유 : 본 공사 준공기한까지 기간연장

〇 연기내역

**** ******	******	*** ****	**	**	******	****		**
						**	**
******** ********	********	***** ****************	*	*	********** ********	*********	*********

〇 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 준공기한 연기 검토보고 1부.  끝.

	서울숲관리사무소장
주무관	임혜경		시설팀장	박계현		서울숲관리사무소장	전결 08/02
하종식
협조자
시행	서울숲관리사무소-5673	(	2023. 8. 2.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 뚝섬로 273, 동부공원여가센터 2층 시설과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-460-2960	/전송	02-460-2971	/	apricot77@seoul.go.kr	/	부분공개(5)