아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	동부공원여가센터
수신	공원운영과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(2023년 서울숲 노후 체육시설 정비공사)

우리 센터에서 추진 중인 「2023년 서울숲 노후 체육시설 정비공사」와 관련, 아래와 같은 사유로 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2023년 서울숲 노후 체육시설 정비공사

나. 공사기간 : 2023. 5. 11. ~ 8. 8.

다. ************************************************************

라. ************************

마. 준공기한 연기

- 당  초 : 2023. 5. 11. ~ 8. 8.

- 변  경 : 2023. 5. 11. ~ 8. 31.(23일 연장)

바. 연기사유 : 장마, 폭염 등 기상상태 및 현장여건 등으로 절대공기 부족

사. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 1. 준공기한 연기 보고(서울숲 노후 체육시설 정비공사) 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

	서울숲관리사무소장
주무관	이승훈		시설팀장	박계현		서울숲관리사무소장	08/02
하종식
협조자
시행	서울숲관리사무소-5650	(	2023. 8. 2.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 뚝섬로 273, 동부공원여가센터 2층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-460-2996	/전송	02-460-2927	/	soulseoul95@seoul.go.kr	/	부분공개(5)