서울의 중심, 청렴의 중심 종로
	종 로 구
수신	내부결재
(경유)
제목	준공기한 연기 시행(2023년 종로구 미세먼지저감 공익숲가꾸기 사업)

1. 도시녹지과-25384(2023. 8. 1.)호와 관련입니다.

2. 우리 구에서 시행하는「2023년 종로구 미세먼지저감 공익숲가꾸기 사업」에 대하여 다음과 같이 준공기한을 연기하고자 합니다.

가. 사 업 명 : 2023년 종로구 미세먼지저감 공익숲가꾸기 사업

나. 대 상 지 : 종로구 삼청동 산 2-1번지

다. 계약금액 : 금120,380,000원(금일억이천삼십팔만원)

라. 계 약 자 : 서울시산림조합 (대표 : 김덕현)

마. 준공기한 변경내용

- 당   초 : 2023. 06. 12. ~ 08. 10.

- 변   경 : 2023. 06. 12. ~ 08. 27. (17일 연장)

바. 지체상금 부과여부 : 미부과

사. 준공기한 연기사유

- 본 사업 추진 중 지속적인 장마로 인하여 작업일정이 지연됨에 따라 부득이 준공기한 연장 필요

붙임  1. 준공기한 연기 의뢰서 1부

2. 검토보고 1부.  끝.

주무관	고유일		자연생태팀장	강원석		도시녹지과장	유지용		미래도시국장	전결 08/02
代정충영
협조자	주무관	장혜민		계약팀장	조양희		재무과장	김한라
시행	도시녹지과-25474	(	2023. 8. 2.	)	접수		(		)
우	03152	서울 종로구 종로1길 36	/	https://www.jongno.go.kr
전화	02-2148-2852	/전송	02-000-0000	/	freetime@mail.jongno.go.kr	/	부분공개(5)