아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	동부공원여가센터
수신	공원운영과장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 연기의뢰(2023년 서울숲 노후 체육시설 정비공사)

1. 서울숲관리사무소-5687(2023.08.02)호와 관련입니다.

2. 우리 센터에서 시행중인「2023년 서울숲 노후 체육시설 정비공사」에 소요되는 관급자재의 납품기한을 아래와 같이 연기하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 관급자재 납품기한 연기

〇 공 사 명 : 2023년 서울숲 노후 체육시설 정비공사

〇 품    명 : 레미콘, 이동식초소, 인조잔디, 옥외용벤치

〇 연기사유 : 본 공사 준공기한까지 기간연장

〇 연기내역

**** ******	******	*** ****	**	**	******	****		**
						**	**
****************	********	***	*	***	******	********	**********
****************	********	*****	*	*	**********	********	**********
****************	********	****	*	*****	******	********	**********
**************	********	*****	*	*	*********	********	**********

〇 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 준공기한 연기 검토보고 1부.  끝.

	서울숲관리사무소장
주무관	이승훈		시설팀장	박계현		서울숲관리사무소장	08/03
代양혜정
협조자
시행	서울숲관리사무소-5704	(	2023. 8. 3.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 뚝섬로 273, 동부공원여가센터 2층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-460-2996	/전송	02-460-2927	/	soulseoul95@seoul.go.kr	/	부분공개(5)