문서번호	서울숲관리사무소-5709
결재일자	2023. 8. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
운영팀장	서울숲관리사무소장	동부공원여가센터소장
양혜정	하종식	08/03
		김인숙
협 조

「사슴사 환경개선 및 무장애관찰로 조성사업」

준공기한 연기 검토보고

2023. 8.

동부공원여가센터

(서울숲관리사무소)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

「사슴사 환경개선 및 무장애관찰로 조성사업」

준공기한 연기 검토보고

우리 센터에서 시행중인『사슴사 환경개선 및 무장애관찰로 조성사업』과 관련, 준공기한을 아래와 같이 연기하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		공사개요

❍ 공 사 명 : 사슴사 환경개선 및 무장애관찰로 조성사업

❍ 공사기간 : 2023. 5. 26. ~ 8. 23.

❍ 공사위치 : 서울숲 생태숲(사슴사주변)

❍ 공사내용 : 사슴사 관찰로 정비, 분뇨처리장설치, 사슴놀이시설설치, 휴게쉼터 바닥정비, 수목식재 등

❍ 총공사비 : *************

*****************************************************

❍ 도 급 사 : **************

❍ 공사감독 : 서울시설관리공단 공사감독3처

Ⅱ		추진경위

❍ 2023.1.17. ~ 3.17.   : 설계용역 시행

❍ 2023. 4.21.          : 공사 발주

❍ 2023. 5.19.          : 공사계약

❍ 2023. 5.26.          : 공사착공

❍ 2023. 7. 7.          : 실정사항 검토보고

Ⅲ		변경검토내용

□ 준공기한 연기검토

❍ 추진근거 : 서울시설관리공단 공사감독3처-5394(2023.8.3.)호

- 준공기한 연기 검토 요청 및「회의록(20230724)」

❍ ********

**************************************************

**************************************

❍ 준공기한 변경(공사기간 연장일 : 31일 연장)

- 당   초 : 2023. 5.26. ~ 8.23.

- 변   경 : 2023. 5.26. ~ 9.22.

❍ ********************************************************

□ 관급물량 변경검토

❍ 추진근거 : 현장실정사항(회의록 2023.7.24.)

- *******************************************

********************************************

*****************************************************

***********************************************

*************************************************

Ⅳ		조치계획

❍ 계약부서에 공사 변경계약(준공기한 연장) 및 관급자재 납품 변경 요청하여 향후 공정관리에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 관련 공문 각 1부.   끝.