아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	동부공원여가센터
수신	공원운영과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(사슴사 환경개선 및 무장애관찰로 조성사업)

1. 서울숲관리사무소 -5709(2023.8.3)호와 관련입니다.

2. 우리 센터에서 추진 중인 「사슴사 환경개선 및 무장애관찰로 조성사업」과 관련, 아래와 같은 사유로 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 사슴사 환경개선 및 무장애관찰로 조성사업

나. 공사기간 : 2023. 5. 26. ~ 8. 23.

다. 총공사비 :**************

*****************************************************

라. 도 급 자 : ****************************

마. 준공기한 연기

- 당  초 : 2023. 5.26. ~ 8.23.

- 변  경 : 2023. 5.26. ~ 9.22.(31일 연장)

바. 연기사유 : 장마, 폭염 등 기상상태 및 현장여건 등으로 절대공기 부족

사. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 1. 준공기한 연장 검토보고 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

	서울숲관리사무소장
운영팀장	양혜정		서울숲관리사무소장	08/04
하종식
협조자
시행	서울숲관리사무소-5754	(	2023. 8. 4.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 뚝섬로 273, 서울숲관리사무소 (성수동1가)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-460-2981	/전송	02-460-2987	/	yang3395@seoul.go.kr	/	부분공개(5)