문서번호	전시과-4566
결재일자	2023. 8. 7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		전시과장
신지혜		08/07
		신혜영
협 조

「상설전시실 작동형 체험 전시물 기능 개선」

준 공 검 사   결 과 보 고

2023. 8.

서울시립과학관

(전   시   과)

「상설전시실 작동형 체험전시물 기능 개선」

준 공 검 사   결 과 보 고

「상설전시실 작동형 체험전시물 기능 개선」사업이 완료됨에 따라 납품 및 준공검사를 실시하고, 그 결과를 보고드림

1		관 련 근 거

□ 계약체결 통보(상설전시실 작동형 체험전시물 기능개선)전시과-3270(2023.06.20.)

□ 검사원 지정 요구서(상설전시실 작동형 체험전시물 기능개선)총무과-6924(2023.08.07.)

2		사 업 개 요

□ 계 약 명 : 상설전시실 작동형 체험전시물 기능개선

□ 위    치 : 서울시립과학관 상설전시실(서울특별시 노원구 한글비석로 160)

□ 계약기간 : 2023.06.19. ~ 2023.07.31.

□ 계약금액 : *************************

□ 계약업체 : ********************

□ 주요내용 : 작동방법 개선 및 교체가 필요한 작동형 전시물 6종 보수

3		추 진 경 위

□ `23.06.14.          : 추진계획 수립(수의계약)

□ `23.06.19.          : 계약체결

□ `23.06.22.          : 착수 및 착수계 접수

□ `23.07.31.         : 전시물 개선 작업 완료 및 준공계 제출

4		준공검사 내용

□ 과업준공일 : 2023.07.31.(월)

□ 준공검사일 : 2022.07.31.(월) 10:00~11:30

**************************************************

□ 준공검사자 : ****

************************************************

******************************

□ 준공검사 결과보고

❍ 준공검사 일정에 따라 준공검사를 실시한 결과 산출물(전시물 6종)이 시방 및 내역에 맞춰 개선되었으며, 현장 작업완료 상태 확인결과 및 정상작동하고, 전시물 운영 관련 인수인계 교육 실시하였음

- 전시물 목록 : 지진는 어떻게 기록될까?, 공기대포는 어떤 모양으로 날아갈까?, 지하철은 어떻게 움직일까?, 비행기는 어떻게 움직일까?, 교통카드에는 어떻게 정보가 담기고 전달될까?, 냉기와 열기를 볼 수 있을까? 총 6종

❍ 전시물 상세 작업 내용

연 번	전시실	전시물 명	작업 내용
1	G전시실	지진은 어떻게 기록될까?	▸작동 구조 변경(체험대 교체)
2	G전시실	공기대포는 어떤모양으로 날아갈까?	▸작동 구조 변경(기존 고무줄방식이 아닌 샤프트 스프링방식으로 교체)
3	B전시실	지하철은 어떻게 움직일까?	▸작동확인을 위한 LED램프 설치 ▸컨트롤러 추가 제작 ▸안내 출력물 교체 부착
4	B전시실	비행기는 어떻게 하늘을 날까?	▸작동 확인을 위한 LED램프 설치 ▸컨트롤러 추가 제작 ▸안내 출력물 교체 부착
5	B전시실	교통카드에는 어떻게 정보가 담기고 전달될까?	▸작동부 위치 변경
6	R전시실	냉기와 열기를 볼 수 있을까?	▸바람호스 부분 2식 변경(드라이기로 변경) ▸중앙램프 제거 ▸높낮이 조절 체험판 제작 ▸아이스판 덮개(여닫이 경첩방식으로 교체) ▸설명영상용 모니터 및 하우징 추가 부착 ▸안내 출력물 교체 부착

❍ 시방대로 개선 및 납품, 시공완료 하였기에 준공처리 가능함(공정율 : 100%)

5		처 리 방 안

□「상설전시실 작동형 체험전시물 기능개선」계약 건의 준공검사를 완료함에 따라 본 과업을 준공처리 및 준공금 지급

□ 준공 후, 전시물의 현장 적응 및 관람객의 돌발적인 전시물 사용이 예상 되므로 이에 따라 시운전 기간 동안 지속적인 잔손보기 시행 예정

□ 시정보완 등 하자조치가 필요한 사항이 발생되면 즉각 조치하고, 하자 미조치시 하자보수예치금(보증보험증권)으로 해결

□ 전시물 소모성 부품 중 기성품에 대해서는 원활한 유지보수를 위하여 리스트 작성 후 납품

붙임 :  1. 준공계 및 준공검사원 각 1부.

2. 작업 사진 대지 1부.  끝.