문서번호	건축부-12592
결재일자	2023. 8. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	의료시설과장	건축부장		시설국장
이세나	代김형복	이형재		08/04
				안대희
협 조
	시설팀장		代김영덕

『은평병원 현대화사업(리모델링) 설계용역』

(2차수)용역기간 연장에 따른 변경계약 검토보고

2023. 08. 04. (금)

도시기반시설본부

(건 축 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

『은평병원 현대화사업(리모델링) 설계용역』

(2차수)용역기간 연장에 따른 변경계약 검토보고

우리 본부에서 시행 중인 『은평병원 현대화사업(리모델링) 설계용역』과 관련, 용역사로부터 향후 필수 절차 이행 등을 위한 용역기간 연장 실정보고가 제출되어 이를 검토 후 보고드림

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명 : 은평병원 현대화사업(리모델링) 설계용역

ㅇ 위    치 : 서울특별시 은평구 백련산로90(응암동232-3외 2)

ㅇ 사업규모 : 총 9,016㎡(증축42㎡ + 리모델링8,974㎡)

- 본관 : 지하1~지상6층(8,000㎡) / 별관 : 지상2층 ~ 지상3층(1,016㎡)

**************************************

************************************

************************************************************

***************************

****************************************

ㅇ 계 약 자 : ㈜해마종합건축사사무소 외 5

□ 관련근거

ㅇ 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」제9장 계약일반조건 제8절2. 계약긴간의 연장

ㅇ 해마 제23-494호(23.8.1.)「은평병원 현대화사업(리모델링) 설계용역」용역 연장계약에 관한 건

□ 추진경위

ㅇ ’22. 4.   은평병원 리모델링 설계용역 추진계획(안)

ㅇ ’22. 9.   설계용역 착수

ㅇ ’22. 12.  제1차 설계용역 자문위원회 개최

ㅇ ’23. 3.   용역기간(1차) 연장등에 따른 계약변경

- 건축부-4431호(2023.3.17.) / 총무부-6151호(2023.3.30.)

ㅇ ’22. 5.   제2차 설계용역 자문위원회 개최

ㅇ ’23. 7.   설계경제성(VE) 검토 시행

*********

**************

*************************************************             ****

*****

*******************************************************************

**************************************************************

********************************************  *************************************************

********************************************

**************************

*************

**	**	*** *******	**
**		**	*
*	*********	*	*********************
*	************	**	**********************
*	********	**	***************
*	**********	*	************************************
*	***********	**	*************************************** *********************

*********

**	**	**	**
******	*********************	**********************	******
**	****************	***************	*****
******	********************	*********************	******
**	************	************	*****

*************

******

******************************************   *********

***********************************************************

******

**********************************************         ***********

붙임 용역기간 연장에 대한 실정보고 및 변경계약을 위한 서류 일체 1부.  끝.