문서번호	녹지관리과-1019
결재일자	2023. 8. 7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		녹지관리과장
변동풍		08/07
		이무림
협 조

여의도한강공원 멀티플라자 잔디 정비 공사

착공신고서 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

미래한강본부

(녹지관리과)

여의도한강공원 멀티플라자 잔디 정비공사

착공보고서 검토보고

"여의도한강공원 멀티플라자 잔디 정빅 공사"와 관련 도급사로부터 "착공신고서"가 접수되어 아래와 같이 검토보고합니다.

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명: 2023년 여의도한강공원 멀티플라자 잔디 정비 공사

ㅇ 공사기간: 2023.8.1.~8.25.

ㅇ *******************

ㅇ 공사내용: 잔디식재 등

ㅇ *********************

ㅇ 발 주 청: 미래한강본부(녹지관리과)

□ 보고내용

ㅇ 착공신고서 제출항목

제출 항목		관련 근거
현장기술자 지정신고서	7. 안전관리(대책)계획서	✓공사계약 일반조건 제17조(착공 및 공정보고) ✓건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제127조(착공신고서 검토 및 보고)
2. 건설공사 공정예정표	8. 유해·위험방지계획서
3. 품질시험계획서	9. 노무동원 및 장비 투입 계획서 9-1. 건설기계 현장별 보증서 발급 여부
4. 공사도급계약서 사본 및 산출내역서	10. 관급(사급)자재 수급계획서
5. 착공전 사진	11. 직접시공계획서 통보 여부(예정일)
6. 현장기술자 경력확인서	12. 건설공사대장 통보 여부(예정일)

ㅇ 착공신고서 검토

검토 항목	제출 여부	검토 내용	비 고 (지시내용)
1. 현장기술자 지정신고서	○	❖ 현장대리인(갑) : 적정 · 조경시공관리 초급 3년이상 ➫ 산업기사 이상 3년 실무 종사, (조경)분야의 중급기술인 이상·초급기술인 시공관리업무 3년 이상 종사 ※ 건설산업기본법 시행령 제35조 ②항 별표5 참조	-
	X	❖ 해당없음 ※ 건설기술진흥법 시행규칙 제50조 ④항 별표5 참조	✓ 총공사비 2억원 미만 전문공사
	X	❖ 해당없음 ※ 산업안전보건법 시행령 제16조 ①항 별표3 참조	✓ 공사금액 50억원 미만 공사
2. 건설공사 공정예정표	○	검토결과 이상없음	-
3. 품질시험계획서	X	❖ 해당없음 ※ 건설기술진흥법 제55조, 동법 시행령 제89조 ②항 참조	✓ 총공사비 2억원 미만 전문공사
4. 공사도급 계약서 사본 및 산출내역서	○	제출 : 검토결과 이상없음	-
5. 착공 전 사진	○	이상없음	-
6. 현장기술자 경력확인서	○	적정	-
7. 안전관리계획서 (대책)	X	❖ 해당없음 ※ 건설기술진흥법 제62조, 동법 시행령 제98조, 99조, 동법 시행규칙 제58조 별표7 참조	-
8. 유해·위험 방지계획서	X	❖ 해당없음 ※ 산업안전보건법 제42조 동법 시행령 제42조 참조	-
9. 노무동원 및 장비 투입 계획서	○	이상없음	-
9-1. 건설기계 현장별 보증서 발급	X	❖ 해당없음 ※ 건설산업기본법 제68조의 3	-
10. 관급(사급)자재 수급계획서	X	미제출	✓실착공 전 계획서 제출
11. 직접시공계획서	○	제 출 : 검토결과 이상없음 ※ 건설산업기본법 제28조의2, 동법 시행령 제30조의2	-
12. 건설공사대장	X	❖ 해당없음 ※ 건설산업기본법 제22조 동법 시행령 제26조	1억원 미만 공사

ㅇ 검토의견

- 도급사에서 제출한 착공신고서에 대해 검토한 결과 보완서류에 대해서는 실착공(공정별 착공) 전 시행계획서에 포함하여 제출토록 지시

□ 조치사항

ㅇ 상기 검토사항 보완서류에 대해 실착공(공정별 착공) 전 제출토록 도급사에 지시하고자 함

붙임 1. 착공신고서 1부.

2. 착공신고검토 관련자료 1부.  끝.