문서번호	도로보수과-8203
결재일자	2023. 8. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장
온지현		08/08
		김순수
협 조

작업지시(3차) 변경 검토보고

『2023년 도로 및 교통안전부속물 유지보수공사(연간단가)』

2023. 6.

북부도로사업소

(도로보수과)

작업지시(3차) 변경 검토보고

『2023년 도로 및 교통안전부속물 유지보수공사(연간단가)』

우리 사업소에서 시행중인 『2023년 도로 및 교통안전부속물 유지보수공사(연간단가)』와 관련 작업지시(3차) 변경에 따른 검토보고임

Ⅰ		관련문서

□ 도로표지병 관리업무 수행 철저 및 전수조사결과 제출요청[도로관리과-671호]

□ 도로표지병 전수조사 계획 [도로보수과-7515호]

Ⅱ		공사개요

□ 공 사 명 : 2023년 도로 및 교통안전부속물 유지보수공사(연간단가)

□ 공사기간 : 2023. 3. 30 ~ 12. 31.

□ 공사개요 : *****************************

□ 계약금액 : ************

□ 계약상대자 : *****************

Ⅲ		작업지시 변경개요

□ 작업지시(3차) 개요

○ 작업 기간 : 2023. 7. 3. ~ 8. 18.

○ 작업 내용 : 과속방지턱 도색 외 2개공종

연번	공종명	단위	수량	위 치
1	********	*	*****	*************
2	********	**	*	********
3	********	*	*	*******

□ 변경사항 검토

○ *********************************************************************************

□ 작업지시 변경내용

○ 작업 기간

**************************

*******************************

○ 작업 내용 : **********************************

연번	공종명	단위	작업지시 수량
			당초	변경
*	********	*	*****	*****
*	********	**	*	*
*	********	*	*	*
*	********	*	*	***
*	********	*	*	***

Ⅳ		조치계획

○ 상기 작업지시 변경 검토사항 대해 『2023년 도로 및 교통안전부속물 유지보수공사(연간단가)』에 변경 작업지시하여 조속히 정비토록 하고 작업완료 보고서에 따라 정산처리 하고자 함.

○ 소요예산 현황(3차 작업지시)

(단위 : 천원)

소요 공사비			비고
변경전	변경후	증·감
******	******	********

붙 임 1. 작업지시서(3차-변경) 1부.

2. 내역서(3차-변경) 1부.  끝.