문서번호	기획예산과-10833
결재일자	2023. 8. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		예산팀장		기획예산과장		기획재정국장
박선아		박영수		이정희		08/08
						어용경
협조

2023년도 주민참여예산사업 상반기 모니터링 실시 결과보고

- 2023년도 주민참여예산사업 -

상반기 모니터링 실시 결과보고

2023. 8.

(기획예산과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 [√] 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 [ ] 공약(약속)사업 [ ] 계속사업 [√] 인센티브/공모사업 [ ]
소통·갈등분야 고려사항		●	구민			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	전문가			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	이해당사자			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등발생요인			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
여성친화 도시		성평등 [√] 안전·편의 [ ] 가족·공동체회복 [ ] 여성참여 [ ]
데이터기반행정고려사항		데이터활용 [ ] 지표관리대상 [ ] 기타 [ ]( 분석협조 등 기타 ) 미해당 [ ] ( ) ※ 데이터기반행정 미해당시 간결하게 사유를 기재하시기 바랍니다.
아동친화 도시		아동권리 보장(생존권·보호권·발달권·참여권) [√] 아동 의견수렴 및 반영 [√]
기타 고려사항		일자리 [ ] 환경영향 [√] 안전 [√] 유지비용 [ ] 바른 공공언어 [ ]
		성인지 [√] 취약계층 [√] 장애인 [√] 디자인 [ ] 공직선거법 [ ]
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	서울시	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	기업	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	민간단체	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
구민의견 수렴		●	방법	:	설문조사 [ ] 만족도 조사 [ ] 찬반투표 [ ] 기타 [√]
		●	시기	:	시행 전 [ ] 시행 중 [√] 시행 후 [ ]
언론홍보 계획		기획보도 [ ] 보도자료 [ ] SDTV [ ] 뉴스레터 [ ] 성동구소식지 [ ]
		기고문 [ ] 전자행정서비스 [ ] SNS [ ] 기타(리플릿 등) [ ] 없음 [√]
	● 홍 보 제 목:
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

- 2023년도 주민참여예산사업 -

상반기 모니터링 실시 결과보고

주민참여예산제의 실효성 확보를 위하여 2023년도 주민참여예산사업의 집행과정 및 추진결과에 대하여 모니터링을 실시하고 그 내용을 보고함

Ⅰ		추진 개요

□ 추진근거

○ 2023년 주민참여예산 종합계획[구청장 방침 제110호(2023. 2. 24.)]

○ 2023년도 주민참여예산사업 모니터링 계획(기획예산과-7978호, 2023. 6. 13.)

□ 추진개요

○ 추진시기: 2023. 6. ~ 7.(2차 12월 예정)

○ 대상사업: 2023년도 주민참여예산 사업 63건, 사업비 1,504백만 원

○ 점검내용: 주민 제안사업과 일치여부, 사업 진행률 및 예산 집행률 등

○ 점검방법: 사업추진 현황 서면 검토 및 현장 점검

Ⅱ		집행 현황

□ 부서별 집행 현황

(단위: 개, 백만 원)

사업부서	사업 수	추진완료	추진중	부진	예산액	집행액	집행률
합 계	63	35	4	24	1,504	905	60.2%
자치행정과	9	5	2	2	191	147	76.96%
교육지원과	2	-	-	2	17	0	0%
문화체육과	11	2	-	9	173	15	8.67%
복지정책과	2	1	-	1	10	6	60%
공원녹지과	20	12	1	7	741	446	60.19%
토목과	4	1	-	3	87	13	14.94%
치수과	1	-	1	-	10	6	60%
정보통신과	6	6	-	-	162	162	100%
청소행정과	7	7	-	-	66	65	98.5%
질병예방과	1	1	-	-	47	45	95.7%

□ 사업별 집행 현황(2023. 6. 27. 기준)

○ 총 63개 사업 (완료 35건, 정상추진 4건, 부진 24건)

- 평균 집행률 60.2%, 완료 사업 비율 55.6%

연번	동명	제안사업명	예산액	지출액 (집행률)	집행현황	부서명
1	왕십리도선동	청계꿈나무어린이공원 노후시설물 교체해주세요	40	0 (0%)	부진	공원녹지과
2	왕십리도선동	안전한 골목길 만들기	5	5 (100%)	완료	정보통신과
3	왕십리도선동	즐거운 골목로(老) 만들기	16	0 (0%)	부진	토목과
4	왕십리도선동	안전하고 깨끗한 동네만들기	10	9 (96.6%)	완료	청소행정과
5	왕십리도선동	무단횡단을 막아요	29	26 (92%)	완료	공원녹지과
6	왕십리제2동	무학봉 어울림 축제	15	0 (0%)	부진	문화체육과
7	왕십리제2동	걸음마다 꽃이 피어 있는 길	35	35 (100%)	완료	문화체육과
8	왕십리제2동	무학봉 근린공원 산책로 코스 안내판	30	0 (0%)	부진	공원녹지과
9	왕십리제2동	깨끗하고 안전한 마을 만들기	10	10 (100%)	완료	청소행정과
10	마장동	아름다운 녹지대 조성	50	0 (0%)	부진	공원녹지과
11	마장동	마장 온그린 페스티벌	10	0 (0%)	부진	문화체육과
12	마장동	서마장어린이공원을 화사하고, 밝은 어린이공원으로 가꿔주세요	40	37 (93%)	부진	공원녹지과
13	사근동	아름다운 화단을 만들어주세요	50	0 (0%)	부진	공원녹지과
14	사근동	어린이놀이터 작은도서관 도서책장 및 조명 교체	20	0 (0%)	부진	문화체육과
15	사근동	쓰레기 상습 투기지역 CCTV 설치	10	9 (99%)	완료	청소행정과
16	행당제1동	행당1동 주민센터 계단을 새단장해주세요	16	16 (100%)	완료	자치행정과
17	행당제1동	상습흡연지역 CCTV 설치 요청	7	7 (100%)	완료	정보통신과
18	행당제1동	아름다운 어린이꿈공원을 만들어주세요	7	7 (100%)	완료	공원녹지과
19	행당제1동	느린우체통 개보수	1	1 (100%)	완료	문화체육과
20	행당제1동	상습무단투기 방지용 CCTV 설치 요청	5	5 (100%)	완료	청소행정과
21	행당제1동	주민사랑방 옹달샘 업그레이드	20	0 (0%)	부진	자치행정과
22	행당제1동	구·동정 홍보를 위한 로고젝터 설치	8	8 (100%)	완료	자치행정과
23	행당제1동	행당1동 ‘달보드레 축제’	15	0 (0%)	부진	문화체육과
24	행당제2동	어린이 작은도서관 바닥 전기판넬 설치	20	0 (0%)	부진	문화체육과
25	행당제2동	동 주민센터 앞 옹벽 조형물 설치	35	35 (100%)	정산추진	자치행정과
26	행당제2동	행당 아카데미	7	0 (0%)	부진	교육지원과
27	행당제2동	행당제2동 새마을지도자협의회 방역차량 구매	27	27 (100%)	완료	자치행정과
28	행당제2동	살구나무골 마을축제	13	0 (0%)	부진	문화체육과
29	응봉동	응봉산공원 주출입로 환경개선	25	23 (92%)	완료	공원녹지과
30	응봉동	응봉교하부 교통섬 녹지대 조성	50	48 (95%)	완료	공원녹지과
31	응봉동	응봉매사냥축제	15	0 (0%)	부진	문화체육과
32	금호1가동	대현산 장미 축제	14	14 (100%)	완료	문화체육과
33	금호1가동	CCTV 설치로 안전한 골목길 만들기	50	50 (100%)	완료	공원녹지과
34	금호1가동	고보조명 설치로 안전한 골목길 만들기	6	6 (100%)	완료	청소행정과
35	금호1가동	북카페 진입로 정비	10	0 (0%)	부진	문화체육과
36	금호2-3가동	무수막길25 CCTV 설치	50	50 (100%)	완료	정보통신과
37	금호2-3가동	장터5가길 보행로 정비	25	0 (0%)	부진	토목과
38	금호2-3가동	장터5가길 수목 식재	25	23 (91%)	완료	공원녹지과
39	금호4가동	건강계단으로 금4 주민을 더 건강하게	15	15 (100%)	완료	자치행정과
40	금호4가동	김장, 모두가 함께해요	5	5 (100%)	완료	복지정책과
41	금호4가동	옥수터널을 나무로 꾸며요	40	37 (93%)	완료	공원녹지과
42	금호4가동	독서당로 길을 환하게 만들어요	20	0 (0%)	부진	공원녹지과
43	옥수동	매봉소공원 휴게시설을 교체해주세요	50	0 (0%)	부진	공원녹지과
44	옥수동	매봉산 유아숲 체험원 정비	30	0 (0%)	부진	공원녹지과
45	옥수동	매봉산 아래 녹지를 정비해주세요	20	18 (88%)	완료	공원녹지과
46	성수1가제1동	건강한 몸! 쾌적한 헬스장	24	13 (54%)	정상추진	자치행정과
47	성수1가제1동	아이들도 함께하는 자치회관!	16	3 (19%)	부진	자치행정과
48	성수1가제1동	왕십리로 벽면 녹화 정비	50	50 (100%)	완료	공원녹지과
49	성수1가제2동	쾌적한 우리동네 만들기	10	6 (60%)	정상추진	치수과
50	성수1가제2동	어두운 골목길 다목적CCTV 설치해주세요	25	25 (100%)	완료	정보통신과
51	성수1가제2동	복지사각지대 어르신 반찬나눔	5	1 (24%)	부진	복지정책과
52	성수1가제2동	365일 함께하는 행복거리 만들어주세요	40	0 (0%)	부진	문화체육과
53	성수2가제1동	깨끗한 환경을 위한 불법투기단속 CCTV 설치	20	19 (98%)	완료	청소행정과
54	성수2가제1동	둘레길 수림대 위생해충살충기 설치	47	45 (99%)	완료	질병예방과
55	성수2가제1동	성수동 카페거리를 밝혀주세요	13	13 (100%)	완료	토목과
56	성수2가제1동	항상 빛나는 너에게	10	0 (0%)	부진	교육지원과
57	성수2가제3동	성수 튼튼프로젝트	30	29 (98%)	완료	자치행정과
58	성수2가제3동	성수구두테마공원 새단장	50	50 (100%)	완료	공원녹지과
59	송정동	다목적 CCTV 설치 및 관리	25	25 (100%)	완료	정보통신과
60	송정동	녹지 공간 조성 및 관리	50	46 (90.8%)	정상추진	공원녹지과
61	송정동	무단투기 방지 로고젝터 설치	5	5 (100%)	완료	청소행정과
62	용답동	청계천 매화나무 산책길 조성	50	46 (92%)	완료	공원녹지과
63	용답동	용답초 안심 통학로 설치	33	0 (0%)	부진	토목과

(단위: 백만 원)

□ 사업별 집행률 부진 사유 및 향후 계획(예산 집행률 50% 이하)

○ 예산 집행률 부진 사업 총 24건

연번	부서명	제안사업명	(예산 집행)부진 사유 및 향후 계획
1	자치행정과	주민사랑방 옹달샘 업그레이드	시공사 미선정으로 사업계획 수립 지연, 하반기 추진 예정
2	자치행정과	아이들도 함께하는 자치회관!	현재 공사 진행중으로 7월 중 집행 예정
3	교육지원과	행당 아카데미	주민 의견 추가 수렴 및 강의실 대관 문제로 인한 사업 지연, 9월 중 추진 예정
4	교육지원과	항상 빛나는 너에게	추진방향, 사업 대상, 교육강사 섭외 등 지속적인 협의로 추진일정 지연, 하반기 추진 예정
5	문화체육과	무학봉 어울림축제	10월 내 추진 예정
6	문화체육과	마장 온그린 페스티벌	9월 내 추진 예정
7	문화체육과	어린이놀이터 작은도서관 도서책장 및 조명 교체	2023년 여름 장마철 이후 누수 점검 결과를 토대로 책장공사 및 조명교체 시행 예정
8	문화체육과	행당1동 ‘달보드레 축제’	9~10월 중 추진 예정
9	문화체육과	어린이 작은도서관 바닥 전기판넬 설치	돌봄교실 운영을 위한 주민센터 대관에 따라 안전 문제로 인한 사업 연기, 9월 내 추진 예정
10	문화체육과	살구나무골 마을축제	10월 내 추진 예정
11	문화체육과	응봉매사냥축제	10월 내 추진 예정
12	문화체육과	북카페 진입로 정비	북카페 장소 이전에 따라 보물단지 이전 및 철거 공사와 병행 예정, 10월 내 추진 예정
13	문화체육과	365일 함께하는 행복거리 만들어주세요	서울숲개선과 병행하여 7~8월 추진 예정
14	복지정책과	복지사각지대 어르신 반찬나눔	총 3회차 중 1회차 진행, 2차(7월), 3차(9월) 추진 예정
15	공원녹지과	청계꿈나무어린이공원 노후시설물을 교체해주세요	주민설명회 의견 수렴을 통한 디자인안 선정 등 절차 이행
16	공원녹지과	무학봉근린공원 산책로 코스 안내판 설치	7월 말 추진 예정
17	공원녹지과	아름다운 녹지대 조성	발주 후 집행시기 미도래로 6월 말 집행 완료
18	공원녹지과	아름다운 화단을 만들어주세요	발주 후 집행시기 미도래로 7월 내 집행 완료
19	공원녹지과	독서당로 길을 환하게 만들어요	발주 후 집행시기 미도래로 7월 내 집행 완료
20	공원녹지과	매봉소공원 휴게시설을 교체해주세요	공사 시행 중으로 6월 말 집행 완료
21	공원녹지과	매봉산 유아숲체험원 정비	7월 말 집행 완료
22	토목과	용답초 안심 통학로 설치	6월 말 집행 예정
23	토목과	장터5가길 보행로 정비	집행시기 미도래로 7월 말 집행 예정
24	토목과	용답초 안심 통학로 설치	6월 말 집행 예정

Ⅲ		현장점검 결과

□ 현장점검 일정

○ 기    간: 2023. 6. 28.(수) ~ 8. 1.(화)

○ 대    상: 추진완료 사업 35건

○ 점 검 자: 성동구 주민참여예산위원회 및 지역주민(동별 시행)

연번	동명	사업명	현장점검 의견
1	왕십리 도선동	무단횡단을 막아요	- 은하수가로공원 주변 수목 식재로 무단횡단 방지 - 노후된 매트를 정비하고 훼손된 식재 부분을 집중 보식하여 미관 및 환경 개선 지속적인 관리 필요
2	왕십리 제2동	걸음마다 꽃이 피는 길	가로변 녹지 정비를 통해 무학봉길 배롱나무 특화거리 조성 및 지속적인 유지·관리로 친환경 녹색마을로 조성되어 주민만족도 향상
3	마장동	서마장어린이공원을 화사하고, 밝은 어린이공원으로 가꿔주세요	사업 효과의 지속을 위해 담당부서, 주민들의 협력 필요
4	행당 제1동	아름다운 어린이꿈공원을 만들어주세요	음주 및 흡연 감소
5	행당 제1동	구 동정 홍보를 위한 로고젝터 설치	주민센터 벽면에 로고젝터 설치로 밤길 안전 예방 및 구·동 행사 홍보 용이
6	행당 제2동	새마을지도자협의회 방역 차량 구매	방역 활동 활성화로 방역 요청 민원 해결 및 지속적인 소독 활동으로 해충 방역
7	응봉동	응봉산 공원 주출입로 환경개선	출입로의 목재데크가 현장에 적합하게 설치되었고, 수목 정비로 입구성이 강조되어 응봉산 이용객들의 편의성 향상이 기대됨
8	응봉동	응봉교 하부 교통섬 녹지대 조성	교통섬의 환경에 적합한 다양한 수목을 식재해 쾌적한 경관을 조성하였으며, 추후 지속적인 관리가 요구됨
9	금호 2-3가동	장터5가길 수목 식재	인근 주민들이 자주 이용하는 장터5가길 수목을 화사하게 꾸밈으로써 단독주택 및 아파트 주민들의 만족도가 높을 것으로 사료됨
10	옥수동	매봉산 아래 녹지를 정비해주세요	매봉산 아래 지저분한 녹지정비를 통해 경관개선 및 안전사고 예방 강화 현재 덩굴 식물이 자라고, 토사 유출로 모래주머니가 쌓여 있는 부분은 보수가 시급해 보이며, 향후 주기적 점검 및 관리 필요
11	성수1가제1동	왕십리로 벽면 녹화 정비	도시미관을 저해하는 폐사목을 정리하고 철제플랜터에 관목을 설치함으로써 주변 경관과 조화를 이루는 녹지공간 조성
12	성수2가 제1동	둘레길 수림대 위생해충살충기 설치	둘레길 수림대 설치로 해충 피해가 현저히 적어질 것으로 예상 주민들에게 보여지는 시각적 효과가 있으나, 일부 구간에 한하여 진행됨에 따라 장기적으로 추가 설치 필요
13	성수2가 제1동	성수동 카페거리를 밝혀주세요	보안등 교체로 카페거리가 밝아져 안전사고 예방 효과가 있으나 주변 주민들에게 빛공해 등 추가 민원 발생 요지가 있어 지속적인 유지관리 필요
14	성수2가 제3동	성수 튼튼프로젝트	주민 의견이 반영되어 노후된 운동기구들이 적절히 교체되었으며, 이용자들의 만족도 및 참석률이 높아져 안전한 주민 건강증진 공간이 형성됨
15	용답동	청계천 매화나무 산책길 조성	건강한 수형의 매화나무와 벚나무가 식재되어 주민들의 만족도가 높으며, 청계천 매화나무 산책길에 다양한 꽃묘목 식재 등 산책길과 연계되는 사업이 이루어지길 바람

□ 현장점검 주요 의견

□ 모니터링 사진

▲ 서마장어린이공원을 화사하고, 밝은 어린이공원으로 가꿔주세요	▲ 장터5가길 수목 식재
▲ 새마을지도자협의회 방역 차량 구매	▲ 청계천 매화나무 산책길 조성

Ⅳ		행정 사항

□ 하반기 재정집행 정책에 따라 11월 내 사업 종료 독려	기획예산과

□ 평가 및 보완사항에 대한 조치결과 제출	사업부서

붙임  2023년도 상반기 모니터링 관리카드 및 평가보고서(참고용) 각 1부.  끝.