문서번호	토목부-14705
결재일자	2023. 8. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목설계과장	토목부장
박성준		박운용	08/08
			이임섭
협 조
	주무관			김종혁

- 탄천·한강변 정비 및 탄천보행교 신설 기본 및 실시설계 - 건설사업관리 용역 재개 검토보고

2023. 08.

도시기반시설본부

토목부

- 탄천·한강변 정비 및 탄천보행교 신설 기본 및 실시설계 -

건설사업관리 용역 재개 검토보고

『탄천·한강변 정비 및 탄천보행교 신설 기본 및 실시설계 건설사업관리    (설계감리)용역』재개에 대하여 검토보고 드림.

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 탄천·한강변 정비 및 탄천보행교 신설 기본 및 실시설계 건설사업관리(설계감리)용역

○ 규    모

- 하 천 정 비 : 탄천 L=974m[한강합류부~삼성교], 한강 L=1,690m[청담대교~종합운동장]

-  탄천보행교 : B=3~12m, L=267.1m[탄천서로(옛 서울의료원 공공공지)~탄천동로(잠실운동장 일대)]

○ 용역기간   : 2020.11.02. ~ 2022.08.12.

○ 도 급 비   : 353,602천원

○ 용 역 자   : ㈜유신 외 2개사

□ 추진현황

○ ’20.02.       : 기본 및 실시설계 착수 (동남권사업반)

○ ’20.06.05.  : 설계감리용역 의뢰 (동남권사업반 ⇒ 토목부)

○ ’20.10.27.  : 설계감리용역 계약

○ ’21.08.05.  : 기본 및 실시설계용역 중지 (동남권사업반)

○ ’21.08.06.  : 설계감리용역 중지 (토목부)

○ ’22.09.29.  : 기본 및 실시설계 용역 재개 (동남권사업반)

○ ’23.07.31.  : 탄천,한강변 정비 및 탄천보행교 신설 기본설계 완료 및

실시설계 의뢰 (동남권사업반 ⇒ 토목부)

□ 검토사항

○ 탄천·한강변 정비 및 보행교 신설 기본 및 실시설계용역은 동남권사업반에서 발주 및 계약하여 기본설계를 추진하였으며, 토목부에서는 실시설계 추진을 위해 건설사업관리 용역 발주 및 계약 시행함.

○ 국제교류복합지구 도로개선사업 잠실야구장 위치 미확정으로 `21.8월 설계용역이 중지됨에 따라 건설사업관리 용역을 일시중지하였으나, `23.7월 동남권사업반에서 기본설계가 완료되어 건설사업관리 용역 재개 필요함.

□ 조치사항

○ 건설사업관리 용역 중지 즉시 해제 및 계약기간 연장

- 용역기간 : ’20.10.27. ~ ’22.08.12. (최초계약 : ’20.10.27. ~ ’21.11.01.)

- 중지기간 : ’21.08.02. ~ ’23.08.08.

- 잔여기간 : 92일('21.08.02 ~ 11.01)

□ 행정사항

○ ’23.08.  : 건설사업관리 용역사 ㈜유신에 재개 통보

용역 잔여일수 절대공기 부족으로 준공기한 연기 추진

붙임 : 기본설계용역 완료 공문 1부. 끝.