문서번호	교량안전과-2340
결재일자	2023. 8. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	특수교량팀장	교량안전과장
나용수	김귀용	08/08
		조현석

한강교량 온라인 안전감시시스템 확대 구축용역 시행계획

한강교량 온라인 안전감시시스템

확대 구축용역 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.  08.

교량안전과

(특수교량팀)

『한강교량 온라인 안전감시시스템』

확대 구축용역 시행계획

『한강교량 온라인 안전감시 시스템』 확대 설치와 관련하여 아래와 같이 시행계획을 수립하여 추진코자 함

※ 천호대교, 영동대교, 잠수교

□ 관련근거

ㅇ 『한강교량 온라인 안전감시시스템』 확대설치 운영 방안 검토보고(교량안전과-7742, 2023. 5. 1.)

□ 확대 대상 교량

ㅇ 과업대상 : 한강교량 3개소(천호대교, 영동대교, 잠수교)

ㅇ 소요예산 : 총 사업비 *******천원(유지관리비용 포함)

- 시스템 구축비 : *****************************

- 교  량 유지비 : *********

□ 추진경위

ㅇ ’23.05.01. : 『한강교량 온라인 안전감시시스템』 확대설치 방침 수립

ㅇ ’23.05.19. : 재난관리기금(재난계정) 신청 검토보고

ㅇ ’23.06.05. : 제7차 재난관리기금 운용심의회 심의결과 통보

ㅇ ’23.07.04. : 기술용역 타당성 심사 요청

ㅇ ’23.07.13. : 기술용역 타당성 심사 결과 통보

ㅇ ’23.07.26. : 일상감사 의뢰

ㅇ ’23.07.28. : 일상감사 결과 통보(비대상, 추정가격 10억 미만 일반용역)

ㅇ ’23.07.31. : 나라장터 사전규격 공개

- 규격서에 관한 의견 3건 접수

□ 추진계획

ㅇ 계측센서 설치 및 서버구축 : 별도 발주(용역비 : 474,100천원)

- 별도발주 : 총액입찰, 제한경쟁입찰[가격입찰 후 실적평가], 적격심사,
대기업 및 중견기업인 소프트웨어 사업자의 입찰 참여 제한

- 입찰참가자격 : 아래 자격을 모두 갖춘 자

1) (토목)구조 : 엔지니어링산업 진흥법 제21조 및 같은법 시행령 제33조에 의거 건설부문중 전문분야(구조)에 엔지니어링 활동주체 신고를 필하고 해당분야에 등록된 업체 또는 기술사법 제6조에 의거 건설부문중 전문분야(구조)에 등록된 업체

2) 정보통신 : 엔지니어링산업 진흥법 제21조 및 같은법 시행령 제33조에 의거 정보통신부문중 전문분야(정보통신)에 엔지니어링 활동주체 신고를 필하고 해당분야에 등록된 업체 또는 기술사법 제6조에 의거 정보통신부문중 전문분야(정보통신)에 등록된 업체

3) 정보관리(대기업 및 중견기업인 입찰 참여 제한) : 엔지니어링산업 진흥법 제21조 및 같은법 시행령 제33조에 의거 정보통신부문중 전문분야(정보관리)에 엔지니어링 활동주체 신고를 필하고 해당분야에 등록된 업체 또는 기술사법 제6조에 의거 정보통신부문중 전문분야(정보관리)에 등록된 업체 또는 소프트웨어 진흥법 제24조 및 과학기술정보통신부 고시에 의거 소프트웨어사업(분야 : 패키지소프트웨어 개발·공급사업)에 등록한 업체

※ 본 사업은 20억원 미만 사업으로 「소프트웨어 진흥법」 제48조(중소 소프트웨어사업자의 사업참여 지원) 및 중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침 제2조, 제3조에 따라 대기업 및 중견기업인 소프트웨어 사업자의 입찰 참여 제한

3) 입찰참가신청 서류 접수마감일 현재「정보통신공사업법」제14조 에 의한 정보통신공사업자로 등록한 자

- 분담비율 : (토목)구조(70%), 정보통신15%, 정보관리15%

- 이행실적 : 부문별 동일용역실적 기준 이상 또는 유사용역실적 기준 이상 실적(분담부문별로 각각 충족)

1) 동일용역실적 : 최근 10년이내 동일종류 준공실적

→ 건설부문 : 교량에 계측시스템 구축용역으로 준공금 237백만원 이상

→ 정보통신부문 : 교량에 계측시스템 구축용역으로 준공금 142백만원 이상

2) 유사용역실적 : 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준 제1장 입찰참가자격 사전심사기준
[별표 2] 공종별 동일공사와 유사공사 범위를 기준으로 한다.

ㅇ 시스템 업그레이드 및 유지관리 : 설계변경*****************

- ’23년 안전감시시스템 유지관리 용역사에서 시행후 변경계약 시행

- ****************************************

ㅇ 사전규격서 의견서 반영

- 소프트웨어 사업 관련 법령준수 요청 : 반영

- 입찰 참가자격(기술사) 제한이 과도함으로 삭제 요청 : 반영

- 정보통신과 정보관리 면허 삭제 요청 : 미반영

※ 미반영 사유 : 본 과업은 계측기 설치와 시스템 구축, 프로그램 설치 등이 포함된 용역으로 정보통신과 정보관리 면허가 필요함

- 유사 용역실적 : 법규검토 수정(자체)

□ 향후계획

ㅇ ’23.09. ~ ‘24.05. : 계측센서 설치 및 서버구축 용역 시행

ㅇ ’23.08. : 시스템 업그레이드 및 유지관리는 기존 유지관리업체를 활용하여 설계변경 추진

붙임  『한강교량 온라인 안전감시시스템』 확대설치 운영 방안 방침서 1부.  끝.