문서번호	도로보수과-8197
결재일자	2023. 8. 8.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
조순형		김순수	08/08
			이도헌
협 조

「23년 포장도로 및 교통안전시설 공사 재해예방 기술지도」

중도타절 및 계약해지 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.  8.

북부도로사업소

(도로보수과)

「23년 포장도로 및 교통안전시설 공사 재해예방 기술지도」

중도타절 및 계약해지 검토보고

「23년 포장도로 및 교통안전시설 공사 재해예방 기술지도」 용역 관련 계약상대자의 경영악화에 따른 폐업**************으로 용역진행이 어려워 용역 포기각서를 제출함에 따라 중도타절 및 계약해지에 대한 검토보고임.

Ⅰ		용 역 개 요

ㅇ 용  역  명: 23년 포장도로 및 교통안전시설 공사 재해예방 기술지도

************************************

**************************************

*********************

***************************

Ⅱ		보 고 내 용

ㅇ 2023. 1. 20. 계약상대자인 ******** 과 계약체결하여 용역을 진행하던**************** 중,

ㅇ *********** 계약업체 사정으로 더 이상 용역진행이 어렵다고 판단, 용역포기각서 제출로 용역진행이 불가한 실정.

Ⅱ		추 진 경 위

ㅇ 2023. 1. 19.: 용역시행 방침

ㅇ 2023. 1. 20.: 계약체결

ㅇ 2023. 1. 25.: 착수계 제출

ㅇ 2023. 7. 19.: 계약상대자 용역 포기각서 제출

Ⅲ		처 리 의 견

ㅇ 계약상대자 ******** 의 *********** 더 이상 정상적인 용역 진행이 어려울 뿐만 아니라 용역과 관련하여 일체의 권한을 포기한다는 용역 포기각서를 제출한 실정이며,

ㅇ 하반기 공사 및 용역 재해예방을 위해 중도타절 및 계약해지가 타당하다고 판단되며, 기시행한 용역비 정산 검토.

Ⅳ		향 후 계 획

ㅇ 계약상대자 및 계약부서에 용역계약 해지 통보 및 정산(***********)

ㅇ 중도 타절 후 잔여 물량에 대해서는 하반기 공사 및 용역 재해예방 기술지도 용역 발주(*****************)하여 공사관리에 만전을 기하고자 함.

붙임: 용역 포기각서 1부.  끝.