서울의 중심, 청렴의 중심 종로
	종 로 구
수신	내부결재
(경유)
제목	2023년 시공원(사직근린공원) 보수정비사업 준공기한 연기 시행

우천, 폭염 등 작업여건 악화에 따른 작업 공기가 부족하여 2023년 시공원(사직근린공원) 보수정비사업의 준공기한을 아래와 같이 연기하고자 합니다.

1. 공 사 명: 2023년 시공원(사직근린공원) 보수정비사업

2. 대 상 지: 종로구 사직동 산 1-24 일대

3. 계약금액: 금177,034,000원(금일억칠천칠백삼만사천원)

4. 도급업체: 허브플러스조경 대표 박호범

5. 공사기간

- 당  초: 2023.06.14. ~ 2023.08.12.

- 변  경: 2023.06.14. ~ 2023.08.31.

6. 지체상금 부과여부: 미부과

7. 준공기한 연기사유: 장마, 폭염 등에 따른 절대공기 부족

붙임  1. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

2. 준공기한 연기 검토보고 1부.  끝.

주무관	선은혜		공원조성팀장	정일규		도시녹지과장	유지용		미래도시국장	08/09
이정식
협조자	주무관	장혜민		계약팀장	조양희		재무과장	김한라
시행	도시녹지과-26026	(	2023. 8. 9.	)	접수		(		)
우	03152	서울특별시 종로구 종로1길 36, 대림빌딩 9층 (수송동)	/	https://www.jongno.go.kr
전화	02-2148-2832	/전송	02-2148-5831	/	sunday13@mail.jongno.go.kr	/	부분공개(5)