문서번호	도시녹지과-26006
결재일자	2023. 08. 09
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		공원조성팀장		도시녹지과장		미래도시국장
선은혜		정일규		유지용		08/09
						이정식
협조

- 2023년 시공원(사직근린공원) 보수정비사업 -

준공기한 연기 검토보고

미래도시국

도시녹지과

- 2023년 시공원(사직근린공원) 보수정비사업 -

준공기한 연기 검토보고

『2023년 시공원(사직근린공원) 보수정비사업』추진 관련, 우기 및 폭염 등 날씨의 영향으로 작업 공기가 부족하여 아래와 같이 준공기한을 연장하고자 함

1		사업개요

□ 위    치: 종로구 사직동 산 1-24 일대

□ 공사기간: 2023. 6. 14. ~ 8. 12.

□ 공사내용: 노후 쉼터·등산로 계단 등 시설물 철거 및 정비

□ 도 급 액: 금177,034,000원(시비)

□ 도 급 자: 허브플러스조경 대표 박호범

2		준공기한 연기 검토

□ 연기사유

❍ 서울시 재무과-36224(2023.8.7.)호 관련, 최근 폭염 재난 위기경보 수준이 격상됨에 따라 현장근로자 휴식 시간 보장 등 근로자 안전을 위해 작업일정 지연에 따른 절대 공기 부족

❍ 지속되는 우천 등 작업여건 악화에 따른 절대공기 부족

□ 준공기한 연기

❍ 당  초: 2023. 6. 14. ~ 8. 12.

❍ 변  경: 2023. 6. 14. ~ 8. 31.(19일 연장)

□ 귀책사유: 종로구청

□ 지체상환금 부과 여부: 미부과

3		보고자 의견

□ 상기와 같이 준공기한 연기사유가 타당하므로 준공기한을 연기하여사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙임  폭염 재난 대응을 위한 지방자치단체 계약집행운영 요령 공문 1부.  끝.