문서번호	보행자전거과-11801
결재일자	2023. 8. 10.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
주무관	자전거도로팀장	보행자전거과장
박지훈	이덕배	08/10
		이선희

보조간선도로망 구축 사업비 재배정 추진 계획

『상암·잠실지역 보조간선도로망 구축에 따른』

사업예산 재배정 추진계획 보고

2023. 8.

도시교통실

(보행자전거과)

『상암·잠실지역 보조간선도로망 구축에 따른』

사업예산 재배정 추진계획 보고

「자전거 보조간선도로망 구축을 위한 기본 및 실시설계」용역 준공에 따른 단절없는 자전거도로 구축을 위한 상암·잠실지역에 대한 사업예산을 관리기관에 재배정하여 사업시행에 만전을 기하고자 함.

□ 사업개요

○ 사업규모

- 상암지역 : 자전거도로 11.2km 구축(신설 2km, 보수 9.2km)

- 잠실지역 : 자전거도로 5.7km 구축(신설 0.5km, 보수 2.6km, 개선 2.6km)

○ 주요 사업내용

- (안전성 및 시인성) 노후 자전거도로 재포장, 교통안전표지, 안전휀스 설치 등

- (연계성) 단절된 자전거도로 연결 및 정비

- (편의성) 기 설치된 자전거도로 개선을 통한 보행자 및 자전거 이용자 간 안전사고 방지

빨간색 : 신설구간 파란색 : 보수구간
상암지역	잠실지역

□ 그간 추진경위

○ '22.05.24. : 기본 및 실시설계 용역 착수

○ '23.06.13. : 경찰청 규제심의 승인

○ '23.07.05. : 설계용역 완료

○ '23.07~08. : 관리기관별 사업시행 방안 협의

□ 보조간선도로망 구축 계획

① 상암지역

- 자전거·보행자겸용도로(비분리형) 신설

- 기존 자전거도로 보수(9,179m) 및 안전시설 확충

· 안전시설물 확충 내역

합계	노면표시						안전표지	안전휀스
	천천히	자전거	정지	자전거 · 보행자	픽토그램	진행방향	자전거 · 보행자
604	41	54	29	28	11	5	13	423

② 잠실지역

- 자전거·보행자겸용도로(분리형) 신설

- 기존 사유지측으로 설치된 자전거·보행자겸용도로(분리형)를 차도측으로 개선

- 기존 자전거도로 위치 개선에 따른 횡단도 연계성 확보를 위한 지장물 이설(2개소)

- 기존 자전거도로 보수(5,660m) 및 안전시설 확충

· 안전시설물 확충 내역

합계	노면표시								안전표지
	천천히	자전거	정지	자전거 · 보행자	픽토그램	보행자주의	횡단주의	진행방향	자전거 · 보행자	자전거횡단
262	54	95	41	17	1	27	8	14	4	1

○ 노선별 소요예산(사업 우선순위)

상암지역	잠실지역

- 상암지역 : ① → ② → ③ → ④ → ⑤

구 분	합 계	1번구간	2번구간	3번구간	4번구간	5번구간
공 사 비(천원)	632,680	175,200	138,250	4,040	66,810	248,380
공사규모(m)	11,172m	3,633m	2,592m	1,993m	1,422m	1,532m

- 잠실지역 : ① → ② → ③ → ④ → ⑤ → ⑥

구 분	합 계	1번구간	2번구간	3번구간	4번구간	5번구간	6번구간
공 사 비(천원)	1,255,057	754,927	325,240	52,410	41,000	68,940	12,540
공사규모(m)	5,706m	2,560m	532m	410m	800m	744m	660m

□ 사업비 재배정 계획

○ 2023년 예산현황

(금액:천원)

구 분	’23년 예산
	합 계	’22년 명시이월	’23년 본 예산	비 고
합 계	1,683,698	648,098	1,035,600
시설비	1,561,800	600,000	961,800
감리비	121,898	48,098	73,800

○ 유지·관리 기관별 사업비 재배정

- 소요예산

(금액:천원)

구 분		합 계	소 계	신설구간	보수구간	개선구간
합 계		1,561,800	1,561,800	4,040	802,833	754,927
상암지역	마포구	631,983	409,560	4,040	405,520	0
	서부도로사업소		222,423	0	222,423	0
잠실지역	송파구	929,817	929,817	0	174,890	754,927

- 잠실지역 신설구간의 경우 석촌호수 동·호구간을 포함하여 송파구에서 추진중인 보행환경 개선사업 추진과 연계 추진 예정으로 금회 재배정 제외

□ 향후계획

○ 사업비 재배정 및 공사발주            : ’23. 8.

○ 공사착수 및 준공                     : ’23. 9. ~ ’24. 7.  끝.