문서번호	급수운영과-14587
결재일자	2023. 8. 11.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장	강서수도사업소장
최형석	代노병권	김근용	08/11
			정진일
협 조
	주무관		김영찬

『고척동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사 』

분기밸브 교체공사 및 통수계획

2023. 8.

강서수도사업소

(급수운영과)

분기밸브 교체공사 및 통수계획

「고척동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사」

우리사업소에서 시행하는「고척동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사」와 관련하여 6구간 분기밸브 교체공사 및 통수계획을 보고드림

※ 관련 공문 : 시설관리공단 공사감독2처-9037(2023.08.08.)

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 2023년 고척동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사

ㅇ 위    치 : 고척동 외 4개동 일대

ㅇ 규    모 : 배급수관 D100~D300㎜, L=1,435m

ㅇ 기    간 : 2023. 4. 25. ~ 2023. 11. 6.

ㅇ 총공사비 : 1,650백만원

총공사비	도급비	관급비	복구 및 기타	비고
1,650,058,500	650,058,500	250,000,000	750,000,000	낙찰률 9.053%

ㅇ 시 공 사 : (주)금원건설 – 현장대리인 김해석

ㅇ 공사감독 : 서울시시설관리공단(공사감독2처) 안제민

ㅇ 공 정 률 : 27%(D150~200㎜, L=384m)

ㅇ 위 치 도 (분기밸브 교체공사)

□ 단수계획

ㅇ 단계별 단수계획도

ㅇ 단계별 공사 개요

구분	공사 내용	작업 기간	단수세대
사전 작업	새들분기(D200/40, D100/40) 후 가설급수시설 설치 6~8구간 계량기 연결	2023.08.16.(수) 10:00~16:00(6시간)	-
1단계	기존관 분기밸브 교체공사 D200×D150㎜(분기)	2023.08.17.(목) 09:00~12:00(3시간)	90세대
2단계	기존관 분기밸브 교체공사 D150×D150㎜(분기)	2023.08.18.(금) 09:00~12:00(3시간)	52세대
3단계	6~8구간 장기사용 배급수관 정비공사 D100㎜, L=184 부설	2023.08.17.(목) ~2023.08.24(금)	단수 없음

□ 통수계획(전체)

ㅇ 1단계 통수구간

- 공사내용 : 기존관 분기밸브 교체공사 D200×D150㎜

- 위    치 : 신정동 1011-11호

- 작업기간 : ’23. 8. 17.(목) 09:00 ~ 12:00

- 단수여부 : ‘단수있음’(약 90세대)

- 통수작업 : 소화밸브(100㎜)를 활용하여 세척 후 통수

☞ 밸브조절작업(6개소) : 제수밸브 D200㎜ 2개소, D100㎜ 3개소, D80㎜ 1개소

ㅇ 2단계 통수구간

- 공사내용 : 기존관 분기밸브 교체공사 D150×D150㎜

- 위    치 : 신정동 1008-3(약 52세대)

- 작업기간 : ’23. 8. 18.(금) 09:00 ~ 12:00

- 통수작업 : 다용도밸브(100㎜)를 활용하여 세척 후 통수

☞ 밸브조절작업(1개소) : 제수밸브 D150㎜ 1개소

ㅇ 3단계 통수구간

- 공사내용 : 장기사용 배급수관 정비공사 D100~150㎜, L=184m 부설

- 위    치 : 신정동 1008-1호 ~ 1009-11호

- 작업기간 : ’23. 8. 17.(목) ~ 8. 24.(금) (세척 ’23. 8. 24(금) 15:00 ~ 18:00)

※ 2차 배급수관 정비공사에 따라 세척 일정 변경

- 단수여부 : ‘단수없음’(가설급수시설 설치)

- 통수작업 : 소화전밸브(100㎜)를 활용하여 세척 및 수질검사 후 통수

☞ 밸브조절작업(4개소) : 제수밸브 D200㎜ 2개소, D100㎜ 3개소

□ 행정사항

ㅇ 위 검토결과를 서울시시설관리공단 통보

ㅇ 통수전 수질검사의뢰 - 수질팀

붙임 : 1. 작업계획서 1부.

2. 단수홍보문 1부.

3. 밸브조절계획 1부.

4. 현수막 시안 1부.  끝.