문서번호	시설관리과-13695
결재일자	2023. 8. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장		북부수도사업소장
탁기홍	김성호	이규현		08/11
				권태규
협 조
	행정지원과장		代박은화

『동북선 2공구 경전철 사업구간 저촉 상수도관 이설』관련 수계전환(2단계) 등 급수운영 추진계획

『동북선 2공구 경전철 사업구간 저촉 상수도관 이설』관련

수계전환(2단계) 등 급수운영 추진계획

2023. 8.

북부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

『동북선 2공구 경전철 사업구간 저촉 상수도관 이설』관련

수계전환(2단계) 등 급수운영 추진계획

시설관리과장:이규현 ☎3146-3390 시설관리팀장:김성호 ☎3393 담당:탁기홍☎3398

동북선 2공구 경전철 사업구간 상수도관 이설공사가 완료(900㎜ 본관)됨에 따라 송중동 일대 안정적 급수운영을 위한 수계전환(2단계)을 추진코자 함

※ 추진근거 : 본부 배수과-22016,‘22. 6.10

1		수계전환 개요

□ 추진배경

ㅇ 동북선 2공구 경전철 구간내 저촉 상수도관 이설공사 완료

ㅇ 미아동 일대 월계 · 북 악 배수지 수계로 환원을 통한 안정적 수돗물 공급

	※ 동북선 건설공사(2공구) 저촉 상수도관 이설
□ 위 치 : 4호선 미아사거리역 인근 □ 기 간 : ’23. 2. ~ '23.8. (규모) D400~900㎜, L=485m □ 시 행 사 : 도시기반시설본부, (주)호반산업

□ 추진경과

ㅇ 운영기간 : ’23.2.27 ~ ’23.8.16 (예정)  ※환기구 설치구간 400mm 이설공사 ‘23.8.15 완료(예정)

ㅇ 운영내용 : 북악배수지 ⇔ 월곡배수지 공사 전 ‧ 후 단계별 수계 전환

①단계

북악터널 배수지 ⇒ 월곡배수지  :‘23. 2. 27 ~‘23. 3. 13 (시행완료)

②단계

월곡배수지 ⇒ 북악터널배수지  :‘23. 8. 16  (금회시행)

2		수계전환(2단계) 추진계획

□ 2단계 수계전환 밸브조절 (월곡 ⇒ 북악) : '23.8.16 시행

- 월곡배수지 급수구역 수계전환 (월곡⇒북악) : 경전철 구간 400mm 이설공사 ‘23.8.15 완료 (예정)

○ 수계전환 세부 계획도 : 1단계 수계전환 역순으로 추진

○ 변류 조절 계획

구분	조절 내용	세부 추진내용
2단계 전환	① (300분기) : 폐 → 개 (북악수계 분기밸브 개방)	‣ 매시간별 점진적 개방
	② (300분기) : 개 → 폐 (월곡수계 유입밸브 폐쇄)	‣ 매시간별 점진적 폐쇄
	- 밸브조절 시 실시간 수질관리시스템 탁도 변화 추이와 연계하여 진행 - 통수 전·후 수질검사 : 다용도 밸브 및 소화전 활용 - 수계조절 : 이이남, 김도성, 권병훈 (수질측정) 장래현, 정지현 - 수질측정 결과 시간, 측정값 등 기록관리 철저 (다량급수처 포함), SNS 공유

□ 급수운영 및 수질관리 계획

□ 다량급수처 9개소 집중관리 및 담당자별 전담관리체계 구축 운용

□ 필터 사용 시민고객 눈높이까지 고려한 수질관리 및 대응체계 구축

○ 저수조 사용 다량급수처

- (운영) 저수조 수위 70%이상 유지 사전 협조 ⇒ 인입밸브 차단 ⇒ 경계밸브 조절

- 경계밸브 조절 및 실시간 수질 확인 후 인입밸브 개방 (전담관리 직원 지정)

○ 24시간 제어실 운영 : APT,병원,학교 등 다량급수처 연계한 협조 체계 구축

- 수질기준 초과 및 탁도 급작 증가시 인입밸브 원격 차단 (선 조치 후 통보)

- 지역내 다량 급수처 비상연락망 구축 : 수계별 수질 초과시 인입밸브 즉각 차단

○ 비상 급수 상시지원 체계 구축 : 급수차 현장 상주, 병물지원 및 급수팩 지원

- ('23.8월 현재) 비상자원 보유현황 : 급수차1대. 급수팩2500개(5L), 병물966병 (2L기준)

○ 비상연락망 구축 운영 : 유관기관 ‧ 시설관리과 (비상시 사업소 전직원 확대 운영)

- 수계전환일 시설관리과 비상근무 시행 : 통수 완료시 까지

- 본부(배수과) 수계요원, 수도사업소장 등 관계자 실시간 SNS 활용 상황 공유

	<혼탁수 예상지역 수질 집중 관리>
○ 수계전환 일정과 연계하여 시간대별 수질관리강화 (탁도, 잔류염소) ‣ 수질확인 위치 : 미아동 51-16 등 소화전 2개소(실시간 수질자동 감시기 1개소 활용) ○ 검사결과 : 수계전환 완급조절 및 다량급수처 인입 차단 등 급수운영 활용 ‣ 공급 수질 악화시 : 비상체제 전환 (비상인력 동원, 본부 급수차 추가 지원, 홍보확대 등)

□ 홍보계획

○ 수계전환 구역 내 다량급수처 시민 홍보

- 공동주택 : 아파트 관리사무소 협조 공문 발송, 안내게시판 등 활용 공사안내

- 병원,학교 등 다량급수처 : 공사 안내, 혼탁수 대응요령 공문발송 및 방문홍보

○ 구청 · 주민센터 행정망 활용 홍보 : (대상) 강북구청, 송중동 주민센터

- 수계전환계획 및 혼탁수 대응요령 홍보요청 : 통·반 등 행정망 활용

- 혼탁수 발생예상 구간 거점별 개별홍보

3		향후계획 및 부서 협조사항

□ 향후계획

○ 수계전환 계획 사전 점검 및 관계자 교육 시행 :  ’23. 8.14

- 사전 모의 훈련 시행 : 수계전환 계획 공유 (임무숙지. 수질검사 교육)

- 다량 급수처 비상연락망 숙지, 수질측정 위치 점검 등

- (현장점검 D-1) 지점별 수계조절 위치, 수질검사 등 현장 인력배치 계획 점검

□ 부서 협조사항

○ (행정지원과) 통수전 수질검사 및 수질 자동측정기 감시, 급수민원 모니터링

○ (급수운영과) 비상시 급수운영 관련 인력 지원 등

붙임  1. 수계전환 관련 업무분장 및 연락망 1부.

2. 주요 다량급수처 비상연락망 1부.  끝.

붙 임1	수계전환 관련 업무 분장 및 연락망

○ 상황총괄 운영 및 수계조절 비상조직도

										상 황 실 장
										시설관리과장
상황 총괄반					현장운영 총괄									수계조절 및 수질검사								급수지원반
반장	시설운영팀장				반장		시설관리팀장							반장		진하영						반장		안전관리팀장
반 원					반 원									반 원								반 원
- 최호림, 류두관					-탁기홍 -(다량급수처) 박인호, 최형선									-(수계)이이남, 김도성, 권병훈 -(수질)장래현, 정지원								-홍민표,우병윤 -이범환,손현두
임무					임무									임무								임무
- 상황유지 및 보고 - 기록관리 유지 ※ 실시간 수질관리 기타 상황총괄					- 현장 총괄 - 변류조절,민원대응 다량급수처 관리 홍보, 상황전파									- 운영총괄 : 이이남 - 수계조절,운영관리 취약지역 수질검사								- 급수차관리 - 병물지원 급수팩 지원

○ 급수차 현장 지원 : 김동현(급수운영과)

○ 비상 지원 자원 관리 현황                              (‘23. 8월 현재)

자원	비상 급수대	비상 급수팩(5L)	비상급수 호스	병물아리수(병)		비 고
				2ℓ	350㎖
현황	3대	2,500	12개	966	440

○ 유관기관 비상연락망

- 본부 상황실(3146-1590), 본부 배수과(3146-1434),  강북구청 상황실(901-6114)

붙임2	(송중동) 주요 다량급수처 비상연락망

연 번	수질자동 계측기	시설 구분	시설명	인입구경	비상연락처	지역 담당자
1	송중동-공원	빌딩	롯데백화점	150	*************	우병윤
2	송중동-공원	빌딩	한신비엠주식회사트레지오	80	*************	우병윤
3	송중동-공원	아파트	한일유앤아이아파트	1150	02-985-8873	우병윤
4	송중동-공원	학교	창문여중고	100	02-986-1703	우병윤
5	송중동-공원	빌딩	에코피아빌딩운영위원회	80	*************	우병윤
6	송중동-공원	빌딩	(주)호텔빅토리아	80	*************	우병윤
7	송중동-공원	병원	햇빛병원	100	*************	우병윤
8	송중동-공원	아파트	경남이너스빌	200	02-983-7447	우병윤
9	송중동-공원	빌딩	대일상사	100	02-6312-6019	우병윤