문서번호	공원녹지과-17823		주무관		공원기획담당	공원녹지과장		도시관리국장
결재일자	2023. 8. 11.		안지연		김성기	김병완		08/11
공개여부	대시민공개							조운기
방침번호			협조
방침번호

- 북악산도시자연공원(민간공원) 조성사업 -

도시계획시설(공원)사업 실시계획인가 변경 열람공고 결과보고

2023.  8.

도시관리국

(공원녹지과)

- 북악산도시자연공원(민간공원) 조성사업 -

도시계획시설(공원)사업 실시계획인가 변경 열람공고 결과보고

우리 구 북악산근린공원(전 도시자연공원) 내 도시계획시설(공원)사업 민간공원 조성과 관련 실시계획인가(변경)을 위한 열람공고를 실시하고 결과를 보고합니다.

□ 사업개요

◦ 사업종류 및 명칭

- 사업의 종류 : 도시계획시설(공원) 조성사업

- 사업의 명칭 : 북악산도시자연공원(민간공원) 조성사업

◦ 사업시행지 : 서울시 성북구 성북동 226-32번지 일원

◦ 규    모 : 10,685㎡㎡

위 치	편입면적(㎡)	소유자	비고
계	10,685	재단법인 라인문화재단
성북동 산25-14	495
성북동 226-32	8,594
성북동 226-320	1,596

◦ 사업시행자

- 주    소 : 전라남도 광주광역시 남구 서오층석탑1길 7-1(서동) 111-85

- 성    명 : 재단법인 라인문화재단 (대표 오정화 이사장)

◦ 사업의 내용 : 북악산도시자연공원 성북지구 내 민간공원 조성

- 주요시설 : 연못, 잔디광장, 쉼터, 휴게소, 야외무대, 산책로 등

◦ 사업기간 : 2020. 6. 4. ~ 2023. 12. 30.

□ 실시계획 인가 변경개요

◦ 변경사항 및 사유

구 분	당 초	변 경	비고
① 사업의 명칭	북악산도시자연공원(민간공원) 조성사업	북악산근린공원(민간공원) 조성사업
	▶ 변경사유 ① 도시관리계획(도시계획시설, 용도구역) 결정(변경) 및 지형도면 고시 [서울특별시고시 제2020-254호(2020.6.29.)] - 도시계획시설(공원) 시설의 세분 : 북악산도시자연공원 → 북악산근린공원
② 사 업 기 간	2020. 6. 4. ~ 2023. 12. 30.	2020. 6. 4. ~ 2026. 12. 31.
	▶ 변경사유 : 사업현장 내 불법점유 지장물 철거 지연에 따른 공사기간 부족

□ 열람공고 개요 및 의견 접수결과

◦ 열람공고 개요

- 공 고 명 : 도시계획시설(공원)사업 실시계획인가 변경을 위한 열람공고

- 공고번호 : 성북구 공고 제2023-1007호(2023.7.27)

- 공고기간 : 2023.07.27. ~ 2023.08.09.(14일간)

- 열람방법 : 시보게재, 관련부서 의견조회

◦ 열람공고 접수의견 : 없음

◦ 관련부서 검토의견

연번	부 서 명	검토의견	비고
1	수변감성도시과	· 저영향개발기법(LID)와 유휴물자원 활용체계를 계획에 반영 · 유출지하수 등의 물자원은 사업대상지 내외 관리용수, 친수용수로 재이용 등 하수도 배출이 최소화 되도록 계획 등	붙임 1 검토의견서 참조
2	공원여가정책과	별도의견 없음
3	공원조성과	별도의견 없음
4	조경과	별도의견 없음
5	자연생태과	별도의견 없음

□ 보고자 의견

◦ 관련부서 검토의견을 시행자에게 통보하여 공원조성 사업계획에 반영될 수 있도록 조치하고,

◦ 도시계획시설(공원) 사업의 명칭 및 사업기간 연장에 대한 실시계획(변경) 인가를 진행하고자 함.

붙임 1. 검토의견서(수변감성도시과) 1부.

2. 고시문(안) 1부.  끝.