아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(실정보고 검토 및 승인 알림(서울시 문화유산보존센터(통합수장고) 건립공사))

1.업무지시현장 : 서울시 통합수장고 건립공사(장기1차) 씨제이대한통운 주식회사, 서울

시 통합수장고 건립공사(장기1차) 장위건설주식회사, 서울시 통합수장

고 건립공사(장기1차) (주)무영씨엠건축사사무소

2.작 성 일 자 : 2023-08-14 17:08:01

3.지 시 내 용 :

가. 무영CM(수) 제23-281호(2023.8.9.)와 관련입니다.

나. 우리 본부에서 진행중인 「서울시 문화유산보존센터(통합수장고) 건립공사」와 관련 사토장 8차 변경 실정보고에 대하여 붙임과 같이 우선 승인하오니 향후 설계변경 소위원회에서 금액이 확정됨을 알려드리며, 추후 사토 반출 실제 물량에 대한 정산하여 주시기 바랍니다.

다. 아울러, 관련 규정을 준수하고 지정된 사토장으로만 사토를 반출해주시기 바랍니다.  끝.

주무관	하성현		의료시설과장	왕승찬		건축부장	08/14
代정채문
협조자	주무관	이범식
시행	건축부-13196	(	2023. 8. 14.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동), 프리미어플레이스빌딩 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-6438-2243	/전송	02-6438-2299	/	hapago@seoul.go.kr	/	부분공개(5)